문서번호	박물관과-9527
결재일자	2021. 9. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		代김소연	09/03 이성은
협조

「삼청각 일화당 등 시설 개보수공사」

변경 계약 검토보고

(공사기간 연장 및 금액변경)

2021. 9.

문 화 본 부

(박물관과)

「삼청각 일화당 등 시설 개보수공사」

변경 계약 검토 보고 (공사기간 연장 및 금액변경)

「삼청각 일화당 등 시설 개보수공사」 관련 시공자로부터 실정보고 승인에 따른 설계 변경 및 공사기간 연장 요청이 접수되어 조치방안을 검토하여 보고함

□ 공사개요

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 대사관로 3외 3필지

○ 규    모 : 지하2층/지상2층, 7개동, 총연면적 4,339㎡

○ 공 사 명 : 삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사

**********************

************************

******************************

□ 추진 경위

○ ’21. 3. 30  : 공사 착공

○ ’21. 7. 26  : 변경 계약 체결

○ ’21. 9.(현재): 마감 공사 진행중

□ 계약변경 사유

○ 관련근거

- 지방계약법 예규(행안부 제114호, 2020. 6.10.)  공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 7절(계약금액의 변경)

- 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 공사계약 일반조건 제26조(계약기간의 연장)

- 산업안전보건법 제70조(건설공사 기간의 연장)

○ 설계변경에 의한 계약금액 조정

- 관련근거 및 설계변경 내용

관련 문서	실정보고 주요내용	증․감 금액
****************** ***********************	************************ ****************************	***********
****************** ***********************	************************* ***************************	***********
************** ***********************	************************	***********
****************** ***********************	*********************** **************************	***********
****************** **********************	************************ ******************	***********
*******		************

- 계약금액 변경내용

(단위: 원)

계약명	공종	업체명	당초 금액	변경 금액	증․감 금액
******************	*****	*******	***********	***********	***********
	*****	*****	***********	***********	**********
	*****	*******	***********	***********	***********
	********		*************	*************	***********

**********************

**********************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************

○ 공사기간 연장

- 관련근거

․ 삼청각 일화당 시설개보수공사 계약변경 요청(MANO건-서울특별시-*******07, 2021. 9. 2)

․ 산업안전보건법 제70조(건설공사 기간의 연장)

※  산업안전보건법 제70조(건설공사 기간의 연장) ① 건설공사발주자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 건설공사가 지연되어 해당 건설공사도급인이 산업재해 예방을 위하여 공사기간의 연장을 요청하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 공사기간을 연장하여야 한다.

- 연장사유

․ ’21. 7월~8월 기간 강우 및 폭염으로 인한 작업 작업불능일 발생으로 공사 준공 기한 연장 필요(증 20일)  ※세부내용 붙임 참조

**	*******	*****	*****
*	********* ****	****************	** *************
*	******** ****	*********	** ********************
*	********* ******** ****	*********************** ******************	** ****************
******		***	***

․ 건축공사 연장에 따라 전기공사, 감리용역 기간 연장 필요

□ 계약변경 내용

계약명(계약상대자)	구 분	당 초	변 경	비 고
***************** *********	****	***********************	***********************	****
	****	***********	***********	**********
******************** *******	****	***********************	***********************	****
	****	*********	**	****
********************** **************	****	***********************	***********************	****
	****	********	**	****

□ 감리자 의견

○ 각 실정보고 된 사항이 설계변경 내역서에 적절하게 반영되었고 수정 및 변경된 부분에 대하여 산출된 공사 수량과 단가가 적정하게 산출된 것으로 판단됨

○ 기와시공 작업 중 7월, 8월의 폭염 및 운천으로 인해 현장의 작업이 원활히 이루어지지 않아, 시공사에서 산출한 20일간(추석연휴 포함)의 공기연장이 불가피하다고 사료됨

□ 처리의견

○ 기승인 실정보고 사항이 적정하게 반영되었고, 공사기간 연장 관련 감리자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되어 삼청각 일화당 등 시설 개보수공사에 대한 설계변경을 승인하고, 재무과에 계약변경을 의뢰하고자 함

붙 임  1. 삼청각 일화당 개보수공사 계약변경 요청 1부.

2. 변경계약내역서 각1부.  끝.