투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(이촌 보광나들목 어린이놀이터 재조성 공사 폐기물 처리 용역)

1. 녹지관리과-6567(2021. 9. 6.)과 관련입니다.

2.『이촌 보광나들목 어린이놀이터 재조성 공사 폐기물 처리 용역』과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 이촌 보광나들목 어린이놀이터 재조성 공사 폐기물 처리 용역

나. 공사내용:

- 폐콘크리트  처리: 114.846 ton,     - 폐아스콘 처리: 169.217 ton

- 건설폐재류 처리: 197.497 ton      - 혼합폐기물 처리: 4.461 ton

- 폐합성수지 처리: 0.29 ton         - 폐합성고무 처리: 18.588 ton

- 건설폐기물 운반(폐콘, 폐아, 폐재, 혼폐): 244.604 ㎥

- 사업장폐기물 운반(폐수지, 폐고무): 18.878 ton

다. 도 급 자: ***********************

라. 도 급 액: ************

마. 준공기한 연기

- 당  초: 2021. 6. 1. ~ 9. 8.

- 변  경: 2021. 6. 1. ~ 11. 30.

바. 연기사유: 현장여건(배수 불량 및 교각 높이 등)에 따른 도입 놀이시설물·공종에 관한 변경 필요하여 준공기한 연기로 인해 용역연장 불가피

사. 귀책소재: 한강사업본부(지체상금 미부과)

붙임 1. 관련 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공원부장
주무관	위승연		녹지관리과장	代김재희		공원부장	09/07 김상국
협조자	주무관	조승만		기획예산과장	안인숙		총무과장	정현석
시행	녹지관리과-6658	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)