투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]위례선(트램) 유찰이후 계획 답변

**** 평소 우리 시정에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

질의하신 사항에 대해 답변드리겠습니다.

1) 이미 예기된 유찰이었으므로, 그럼 거기에 따르는 대비도 하셨던 걸로 사료됩니다. 긴급 공고 기간에 LH와 예산 증액에 대한 협의를 하셨나요? 예산을 증액한다면 어느 예산에서 끌어와서 얼마정도 규모를 예상하시는지?

- ’21.08.19.(1회), ’21.09.01.(2회) 무응찰 유찰되어 바로 국내 제작사와 면담 실시하였으며 면담 결과에 따라 향후 조달구매 재요청을 위해 내부검토 중입니다. 자세한 사항(예산, 규격 등)은 현재 내부검토 중임에 따라, 공개가 불가함을 알려드립니다.

2) 예산증액을 하고 나서 공고를 올린다면 언제쯤.다시 올리실수 있는 건지?

- 예산 이외에도 전반적인 사항에 대해 내부검토 후 올해 안에 조달청에 재구매 요청 및 계약 체결을 위해 노력하고 있습니다.

3) 소규모 예산 증액후 또 유찰된다면 안일한 행정에 따르는 책임 소재는 누구에게 있는지?

- 우리 시는 국토부에 기본계획 승인 요청 시 실례가격(오륙도선 트램)으로 사업비를 책정하였으며, 향후 유찰이 없도록 내부검토를 진행 중이니 참고하여 주시기 바랍니다.

4) 위례 주민이 부담한 교통분담금 규모는 얼마이고, 거기에서 발생한 이자는 얼마인지? 그 이자는 어떻게 쓰이고 있는지? (백만원 단위로 알려주세요)

- 이 사항은 LH에서 답변 가능할 것으로 사료됩니다.

5) 올해동안 lh 및 관계기관과 트램 관련 협의는 몇번 하셨는지? 그리고 성과는 있었지

6) 오세훈 서울시장후보의 송파구 공략 중 하나가위례선 조기 완공이었는데 가능성은 있기는 한지?

- 5), 6) 공통

- 우선 위례선은 '08년3월부터 LH가 위례신도시 택지개발사업 광역교통개선대책으로 추진하였으나 '18년7월 KDI로부터 민자사업 부적격 판정을 받게 됨에 따라, 국토교통부·서울시·LH 등 관련기관 협의를 통해 공공(서울시)주도 시행으로 '19년 5월 업무협약체결이 이루어졌습니다.

'19년 5월 위례선 사업을 이어 받은 우리 시는 '19년7월 중앙투자심사를 완료하고, 기본계획 승인을 위한 용역을 발주·진행하여 국토교통부로부터 '20년10월 위례선도시철도 기본계획 승인을 득하였습니다.

이후 '20년11월부터 수차에 걸쳐 공사수행방식 결정(설계·시공 일괄입찰방식) 및 적정공기 산정을 위한 건설기술심의, 발주방법 적절성 검토을 위한 계약심의위원회 심의와 입찰안내서·건설기준 등에 대한 자문회의를 시행하고 지적사항을 보완 후 '21년 5월 입찰공고하여 현재는 2개의 설계시공 일괄입찰 참여사가 기본설계를 진행 중이며 '21년 12월말 최종 실시설계적격자를 선정하고 공사 계약을 체결할 예정입니다.

다만 우리 시는 당초 위례선의 '24년말 위례선 개통을 목표로 추진하였으나 LH 광역교통개선부담금과 위례선 기본계획 용역결과 총사업비에 차이가 있어, 총사업비 추가 확보 및 국토교통부 승인을 위한 협의 등에 시일이 추가로 소요되었고, 공사기간은 건설기술심의에서 심도 있는 검토결과 45개월로 결정되어 부득이 '25년 9월 개통으로 목표를 조정하였습니다.

위와 관련하여 추가 질의사항이 있으시면 서울시 도시기반시설본부 도시철도계획부(건설관련, 02-772-7159) 도시철도설비부 (트램 관련, 02-772-7289) 로 전화주시기 바랍니다.

주무관							이은석			차량과장					강치석					도시철도설비부장					09/08 김중영
협조자				주무관						전용현
시행			도시철도설비부-8363									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 8층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		772-7289						/전송			772-7308					/													/	부분공개(6)