문서번호	물재생시설과-9793
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김찬우		김태환	09/09 윤창진
협 조
	주무관			김병용

「물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계 용역」

준공기한 연장 검토 보고

2021. 9

물순환안전국

(물재생시설과)

「물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계」

준공기한 연장 검토 보고

「물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계」용역과 관련하여 공법선정 기술제안 재공고로 일정이 지연되어 준공기한을 연장하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 물재생센터 소화조 효율개선 실증 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : ‘21.5.20. ~ 9.19일

********************

○ 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사

○ 주요과업내용

- 현지조사 : 난지물재생센터 1처리장 2단 소화조 2조, 관련부대시설

- 소화조 교반시스템 효율개선 기본 및 실시설계

□ 추진경과

○ ’20. 10월 : 소화조 효율개선 실증용역 추진계획 수립

○ ‘21.  1월 : 소화조 효율개선 실증용역 기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립

○ ‘21. 2~ 3월 : 기술용역 타당성 및 용역발주 심의

○ ‘21.  3월 : 입찰공고

○ ‘21.  5월 : 용역계약 및 진행

○ ‘21.  7월 : 소화조 공법선정 기술제안 공고

○ ‘21.  8월 : 소화조 공법선정 기술제안 재공고

□ 설계변경내용

○ 변경내역 : 준공기한 연장

구분	당초	변경	비고
용역기간	‘21.5.20.~’21.9.19.	‘21.5.20.~’21.11.30.
계약금액	205,000천원	변경없음

○ 변경사유 : 공법선정을 위한 기술제안 재공고로 용역진행 지연

○ 지체상금 : 미부과(계약당사자 귀책사유 없음)

□ 조치계획 : 계약변경

○ 계약변경 의뢰(→재무과), 용역사인 ㈜동해종합기술공사와 변경계약 체결

붙임 : 방침서, 합의각서 각 1부.  끝.