문서번호	토목부-17354
결재일자	2021. 9. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	09/10 임춘근
협조
	광역도로계획팀장		황원근

-올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사-

한가람로~올림픽대로 진입램프 교통안전심의 부결에 따른 공사 추진계획 보고

2021. 9.

도시기반시설본부

(토   목   부)

-올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사-

한가람로~올림픽대로 진입램프 교통심의부결에 따른 공사 추진계획 보고

『한가람로~올림픽대로 진입램프』 공사관련 송파경찰서 교통심의 결과 ‘부결’되어 향후 공사추진계획을 검토하고 보고드림.

1		근 거

○ 송파경찰서 2021년 제3차 교통안전심의 결과통보 → “부결”

[교통과-9384호(2021.8.5.)]

2		사업개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사규모

- 램프신설 : L=1,600m(교량2개소, L=446m)

- 램프이설 : L=1,309m(교량1개소, L=139m)

○ 사업기간 : 2016.04.22 ~ 2022.12.31.(전체), 2021.07.06 ~ 2021.12.31(6차)

○ 총사업비 : (전체) 56,399백만원(‘21년 : 8,706백만원)

○ 공 정 율 : 76.0%

3		추진경위

○ ’18.11.16 : 민원접수(올림픽현대아이파크)

○ ’19.05.31 : 제1차 사업계획변경 조정심의회 개최(행정2부시장외 6명)

○ ’19.06.10 : 사업계획 변경(도로계획과)

○ ’19.08.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 착수

○ ’19.11.29 : 주민간담회 개최

○ ’20.09.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 완수

○ '20.12.   : 실정보고 및 계약심사완료

○ ’21.01.    : 한가람로 진입로 공사를 위한 올림픽대로 교통전환 완료

○ '21.04.~‘21.08 : 송파경찰서 교통규제 심의추진(담당자 사전협의 등)

○ '21.08.05  : 송파경찰서 교통안전심의 개최(결과 ’부결‘)

4		문 제 점

○ 현  황 : 한가람로 ~ 올림픽대로 접속(좌회전 및 우회전) 교통심의 ’부결‘

○ 문제점

‣ ****************************

‣ ***************************************

5		대 책

○ 민원발생 해소 대책

**********************************

- ************************************************************************************************************************************************** ****************************************

※ 송파경찰서 교통심의 제출 교통전문가 분석내용

-**************************************************************************************************************************

※ 회전교차로 설계지침(국토부 2014.12) 준수

구 분		설계기준		적 용	비 고
********		*********		******	***
**	****	**************	***************	****************	***
*****		**************		***************	***

○ 예산집행 부진 대책

*****************************

구분	문제점	대책수립	비고
************	************************** ******************* ********************	************************** ********************* *****************
************	****************************	********************************* ******************
**********	***************************	*****************************

6		향후계획

○ *****************************

‣ ****************************************************

○ *****************************

‣ *********************************************************************

‣ *****************************************************************************************************************

7		감리단 검토의견

◦ ******************************************* ******************************************************************************************* ********************************

8		조치계획

◦ ************************************************************************************ *******************************************

붙임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 및 관련자료 1부.  끝.