문서번호	박물관과-9814
결재일자	2021. 9. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	한식문화공간조성추진반장		박물관과장		문화시설추진단장		문화본부장
남광연	이병두		이성은		변서영		09/10 주용태
협 조

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수 공사』

일화당 설계변경 및 공사 추진 계획

2021. 9.

문화본부

(박물관과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수 공사』

일화당 설계변경 및 공사 추진 계획

우리 본부가 추진 중인『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』관련 일화당 공연장 시설 개선을 위한 설계변경 및 부대공사 시행 계획을 검토하여 보고함

1		추진개요

□ 추진근거

❍ 삼청각 일화당 리모델링 변경계획(박물관과-7075, 2021.7.1.)

❍ 삼청각 일화당 공연장 무대 설비 구매·설치 추진계획(박물관과-9708, 2021.9.8.)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 삼청각 리모델링 사업

❍ 사업기간 : ’16. 4. ~ ’21. 11.

❍ 위    치 : 성북구 성북동 330-115 외 3필지

❍ 총사업비 : ***************************************************

❍ 규    모 : *************************

□ 추진 경위

❍	’21. 3. 30.	:	삼청각 일화당 등 시설 개·보수 공사 착공
❍	’21. 7. 1.	:	일화당 공연장 시설 개선계획(박물관과-7075, 2021.7.1.)
❍	’21. 7. 6.	:	일화당 공연장 시설개선 실시설계용역 착수
❍	’21. 7. 30.	:	공연장 시설개선 실시설계 자문회의
❍	’21. 8. 31.	:	공연장 무대설비 구매·설치 계약심사
❍	’21. 9. 3.	:	일화당 공연장 실시설계 도서 접수

2		일화당 설계변경 계획

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사

○ 시 공 자 : ㈜마노종합건설 대표 정봉휘 외2

○ 공사금액 : *******************

○ 공사기간 : **************************

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제1항 1. 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[행안부 예규 제114호] 제1장 제1절

4. 동일구조물공사와 단일공사의 집행, 5. 분할계약의 금지

○ 설계변경 사유 및 내용      ※ 세부내용 ‘붙임’ 참조

*************************************************************

**************************************************************

*************************************************************

**************************

*************************************

*************************************************************************************************************************

□ 설계변경 및 공사 추진 계획

○ 공사계약 일반조건 및 건설사업관리 업무지침에 따라 시공자에 설계변경 검토 지시하여 관계전문가 기술검토(자문)회의 실시 후 설계변경 및 계약변경 조치하고자 함

※ 추진절차[건설사업관리 업무지침 제63조(설계변경 관리), 국토부고시 제2014-859호]

설계변경 지 시 (발주청 → 시공자)		설계변경 서류접수 (시공자 → 발주청)		설계변경 기술검토 (자문회의)		기술검토 자문사항 조치		계약변경		공사시행 (공사기간: 약 8주)
’21. 9.		’21. 9.		’21. 9.		’21. 9.		’21. 9.		’21.10.~11.

○ 전기·통신·소방 등 설비공사는 관련 법에 의거 별도 발주 추진하고자 함

- 일화당 공연장 시설개선 설비 공사금액                     (단위: 천원)

구 분	총 공 사 비			비 고
	도 급 공 사 비	관 급 자 재 비	총 계
전기공사	*******	******	*******
통신공사	*****	*	*****
소방공사	******	*	******
냉·난방설비	*	******	******
[ 총 계 ]	*******	******	*******

- 예산과목 : 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립 지원, 삼청각 리모델링, 시설비및부대비, 시설비

3		향후추진

○ 2021.  9.         : 일화당 설계변경 자문회의 / 계약변경

설비공사 발주 및 계약

○ 2021.  10. ~ 11.: 공사 시행

○ 2021.  12.        : 공사 준공 및 개관준비

붙 임	일화당 등 시설 개·보수공사 설계변경안

일화당 2층	▸ 공연장, 다목적 홀, 라운지
- 수려한 외부 조망을 고려한 오픈된 다목적 홀(공연, 연회) 조성

**********************************************************************************************************************************************