문서번호	교통행정과-69627
결재일자	2021.9.10.
공개여부	부분공개(5)

주무관	교통개선담당	교통행정과장	건설교통국장		부구청장	구청장
이용철	김종식	김호형	임승락		신상철	09/10 이승로
협 조

2021년 서울형 어린이보호구역 표준모델 및

사고위험 개선 사업

2021. 9.

건설교통국

교통행정과

2021년 서울형 어린이보호구역 표준모델 및

사고위험 개선 사업

서울시, 서울경찰청 서울형 어린이보호구역 표준모델 시범운영 확대 및 사고위험 어린이보호구역 개선 추진에 따라 미끄럼방지포장, 안전시설 등 신설·정비를 시행하고자 함.

Ⅰ		사업개요

추진배경

○ 서울경찰청, 「서울형 어린이보호구역 표준모델」 시범운영 확대 협조

- 서울경찰청 자체 선정 우선순위 대상지점 개선 요청 (교통관리과-5509, 2021.03.19.)

○ 서울시, 사고위험 어린이보호구역 시인성 강화계획 (보행정책과-4555, 2021.04.07.)

- 사고위험 개선 요구되는 어린이보호구역 대상, 통학로 적색포장 시인성 확보

○ 관할경찰서, 보호구역 시종점부 유색포장 정비 요청 (종암경찰서 경비교통과-3840, 2021.05.04.)

추진내용

○ “정덕초교” 「서울형 어린이보호구역 표준모델」 시범운영 확대

- 시인성 강화 미끄럼방지포장, 보행신호 음성안내 보조장치, 신호등 설치

※ 2020년 서울형 어린이보호구역 표준모델 사례 : 석관초등학교

2020년 사업 전	2020년 사업 후

○ 보호구역 전수조사 발견사항, 관할경찰서 및 학교 요청사항 정비 시행

- 어린이보호구역 내 시종점부 등 노후 미끄럼방지포장 등 신설, 정비

디자인포장	미끄럼방지포장(시점부)

그 동안 추진현황

○ 2021.03.19. : 서울경찰청, 서울형 어린이보호구역 표준모델 시범운영 협조 요청

○ 2021.04.07. : 서울시, 사고위험 어린이보호구역 시인성 강화계획
⇒ 서울경찰청 우선순위 대상지점 중 최종대상 선정 요청

○ 2021.04.~05. : 관할경찰서 협의, 사고위험 개선 “정덕초교” 최종 선정 요청
⇒ 정덕초교 보호구역 최근 3년간 어린이사고 4건, 노인사고 4건 발생

○ 2021.05.25. : 서울경찰청, 정덕초교 교통안전규제심의 가결 통보
⇒ 서울형 어린이보호구역 표준모델 확대 대상지 확정

○ 2021.05.~08. : 보호구역 전수조사, 관할경찰서 및 학교 요청사항 등 12개교 정비 확정

○ 2021.08.05. : 성북경찰서, 정덕초교 사고위험 개선 신속 집행 요청
⇒ 서울경찰청 “서울형 어린이보호구역 등” 시행 요청

○ 2021.09.03. : 정덕초교 서울형 어린이보호구역 공사 유관기관 의견조회 및 사전 안내

○ 2021.09. : 서울형 어린이보호구역 표준모델 및 사고위험 개선 계획 수립

Ⅱ		사업내용

사업명 : 2021년 서울형 어린이보호구역 표준모델 및 사고위험 개선 사업

사업대상 : 12개교

○ 서울형 어린이보호구역 표준모델 (1개교) : 정덕초

○ 사고위험 개선 (11개교) : 청덕초, 정수초, 성북초, 돈암초, 장위초, 석계초, 월곡초, 일신초, 새싹유치원, 한빛어린이집, 새싹어린이집

세부내용

○ 서울형 어린이보호구역 표준모델 확대 추진 : 정덕초교

- 미끄럼방지포장 약 5,570㎡, 디자인포장 약 238㎡ 신설, 정비

- 보행신호 음성안내 보조장치 4개 신설, 신호등 신설

○ 사고위험 개선 시인성 강화 : 청덕초교 등 11개교

- 미끄럼방지포장 약 3,054㎡ 신설, 정비

사업기간 : 2021.09.~11.

사업비 : 317,000천원 (시비)

○ 예산과목

- 도시교통실 보행정책과 / 보행권 향상 및 교통약자 안전관리 / 교통약자 이동편의 증진 / 어린이 안전 영상정보 인프라 구축 / 시설비  (시비 : 157,230천원)

- 도시교통실 보행정책과 / 보행권 향상 및 교통약자 안전관리 / 교통약자 이동편의 증진 / 어린이 보호구역 개선 / 시설비  (시비 : 159,770천원)

Ⅲ		발주계획

발주계획 및 소요예산

○ 보행신호 음성안내 보조장치 : 관급자재 조달구매

- 소요예산 : 31,200천원

○ 미끄럼방지포장재 : 다수공급자계약 2단계경쟁 업체선정

※ 관련근거 : 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준(조달청고시 2021-5호, 2021. 3. 3.)」 제3조(2단계경쟁 대상) 제1항 및 제3항에 준하여 중소기업이 제조하는 품목인 경우 1회 1억원 이상 납품 요구시

- 소요예산 : 285,607천원

ㆍ미끄럼방지포장재,t3mm,스탬프 : 9,639천원 (238㎡ × 40,500원)

ㆍ미끄럼방지포장재,t3mm : 275,968천원 (8,624㎡ × 32,000원)

물품 다수공급자계약 2단계경쟁 구매 계획

○ 구매 방법 : 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 (1억원 이상)

- 납품업체 선정기준 : 표준평가방식Ⅱ (제안가격 A형)

- 제안요청업체 : 5개 대상 업체
(※ 시스템 통한 자동추천 2개 업체는 대상 업체에서 제외 요청)

<총 합계>

(단위 : 원)

연번	업체명	물품(1) 규격	물품(2) 규격	금액(1)	금액(2)	총계
1	㈜로드원	미끄럼방지포장재 t=3㎜,스탬프	미끄럼방지포장재 t=3㎜	9,520,000	275,968,000	285,488,000
2	리싸이클㈜	미끄럼방지포장재 t=3㎜,스탬프	미끄럼방지포장재 t=3㎜	9,520,000	267,344,000	276,864,000
3	㈜지디시선산업	미끄럼방지포장재 t=3㎜,스탬프	미끄럼방지포장재 t=3㎜	9,639,000	275,968,000	285,607,000
4	㈜코아캠	미끄럼방지포장재 t=3㎜,스탬프	미끄럼방지포장재 t=3㎜	9,520,000	271,656,000	281,176,000
5	㈜토우건설	미끄럼방지포장재 t=3㎜,스탬프	미끄럼방지포장재 t=3㎜	9,520,000	271,656,000	281,176,000

<물품1, 규격(미끄럼방지포장재,t=3㎜,스탬프)>

(단위 : 원)

연번	업체명	규격	단가	금액
1	㈜로드원	t=3㎜,스탬프	40,000	9,520,000
2	리싸이클㈜	t=3㎜,스탬프	40,000	9,520,000
3	㈜지디시선산업	t=3㎜,스탬프	40,500	9,639,000
4	㈜코아캠	t=3㎜,스탬프	40,000	9,520,000
5	㈜토우건설	t=3㎜,스탬프	40,000	9,520,000

<물품2, 규격(미끄럼방지포장재,t=3㎜)>

(단위 : 원)

연번	업체명	규격	단가	금액
1	㈜로드원	t=3㎜	32,000	275,968,000
2	리싸이클㈜	t=3㎜	31,000	267,344,000
3	㈜지디시선산업	t=3㎜	32,000	275,968,000
4	㈜코아캠	t=3㎜	31,500	271,656,000
5	㈜토우건설	t=3㎜	31,500	271,656,000

Ⅳ		행정사항

2021. 9.~10. : 공사 시행 및 관급자재 구매 재무과 협조

2021.11. : 공사 준공 및 서울시, 관할경찰서 결과 통보

붙임 : 1. 제안요청서 및 제안요청내역서 각 1부.
2. 사업 대상지 1부. 끝.