문서번호	물순환정책과-16467
결재일자	2021. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물순환시설팀장	물순환정책과장
하록		김서연	09/13 김재겸
협조

-2021년 빗물관리시설 확충사업(시설비)- 추가과업에 따른 예산재조정 2차계획

2021. 9.

물순환정책과

- 2021년 빗물관리시설 확충사업 (시설비) -

추가과업에 따른 예산재조정 2차계획

2021년 선정된 빗물관리시설 확충사업(시설비)에 대한 추가 과업여부를 외부 전문가를 통하여 사업예산을 재조정하여 사업에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

○ 위    치 : 빗물관리시설 확충사업 선정 대상지

○ 기    간 : 2021.02. ~ 2021.12.

○ 사 업 비 : 2,492백만원

- 시설비 2,100백만원(사업비의 100% 지원)

- 자치단체보조 392백만원(사업비의 50% 지원,1:1매칭)

○ 사업 대상지 : 10개 자치구, 14개 사업

- 시설비 : 9개 자치구 10개 사업

- 자치단체보조 : 3개 자치구 4개 사업

○ 추진경위

- 빗물관리시설 확충사업(자치단체보조) 선정계획 수립 : ’20.11월

- 빗물관리시설 확충사업(자치단체보조) 선정 : ’21. 2월

▸ 5개 자치구, 10개 사업 신청서 접수

- 빗물관리시설 확충사업 추진계획 수립      : ’21.1월

- 빗물관리시설 확충사업(시설비)선정        : ’21.3월

▸ 11개 자치구, 18개 사업 신청서 접수

- 빗물관리시설 확충사업 대상지 설계심의(자문) : ’21.4월~

Ⅱ		예산 재조정 계획

○ 대 상 지 : 빗물관리시설 확충사업 사업지(강서구 양천로 507~543)

- 기존 사업대상지에 추가과업으로 인한 공사비 증.감 여부를 재검토

⇒ 외부 전문가 의견을 반영하여 추가과업 재검토

○ 사업비 변경

- *******************************************

⇒ 사 유 : 빗물관리시설 추가 설치에 따른 사업비 증액

Ⅲ		행정사항

□ 향후 일정

○ 빗물관리시설 공사  : ’21.09월 ~ 11월

○ 빗물관리시설 준공  : ’21.11월 ~ 12월

○ 빗물관리시설 결산  : ’21.12월

※ 준공 이후 빗물관리시설 반기별 1회이상 자체점검결과 제출(자치구⇒시)

□ 소요 예산 : 80백만원

○ 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경 개선 및 관리, 빗물관리시설 확충, 시설비.

붙임 : 외부 전문가 의견 1부.  끝.