문서번호	정수시설과-9252
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
양봉우		전훈	09/14 조성태
협조

「2021년 취․정수장 구조물 보수공사」

설계변경 심의 결과 보고

2021. 9.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『2021년 취․정수장 구조물 보수공사』

설계변경 심의 결과 보고

「2021년 취․정수장 구조물 보수공사」시행 중 시공물량 증·감 및 추가 변경사항이 발생하여, 설계변경 심의를 실시하고 아래와 같이 결과를 보고드림

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 2021년 취․정수장 구조물 보수공사

□ 공사개요

********************************************

*****************************************

□ 공사기간 : 2021. 3. 26. ~ 9. 21.

□ 도 급 액

********************

**********************************

□ 계약 상대자 : **************

Ⅱ		설계변경 심의회 개최

□ 심의일시 : 2021. 9. 13.(월) 14:00

□ 심의장소 : 정수시설과(회의실)

□ 위 원 장 : 정수시설과장 전훈

□ 심의위원 : 공업6급 김희송, 공업6급 김응균, 시설6급 강인규, 시설7급 김병주

Ⅲ		설계변경 현황

□ 설계변경 내용 및 사유

1. 유해화학물질 취급시설 점검 지적사항에 대한 보완조치(정수시설과-4599호, ‘21.4.26)

- 가성소다 데이탱크, 염소 중화탑, 과산화수소 저장탱크 정비

2. 1염소실 환경개선 관련 협조요청(정수과-8948호, ‘21.8.25.)

- 1염소실 염소저장실 바닥면 도장

3. 시공물량 증·감 내역

- 주요공종 수량 증,감 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증,감(원)
			당초	변경
1. 보수공
균열보수(건식)	B=0.3㎜, t=100㎜, 주입	m	1,355	327	감)19,177,340
표면처리마감(도장포함)	T=1mm	㎡	275	968	증)29,456,658
에폭시페인트칠		㎡	0	124	증)1,884,056
에폭시페인트칠	라이닝 2T	㎡	0	230	증)8,746,900
Meta Joint		m	0	16	증)2,505,728
2. 부대공
강관조립 말비계(이동)	설치 철거(회당)-2m	회	8	3	감)473,505
강관조립 말비계(이동)	설치 철거(회당)-4m	회	8	5	감)426,903

○ (보험료 정산)근거자료(납입확인서 등) 미제출에 따른 감액

************************

************************

************************

○ (산업안전보건관리비 정산)산업안전보건법에 규정된 항목별 사용내역 정산

**********************************************

□ 설계변경 금액                                           (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	공급가액	157,637,919	155,363,637	감)2,274,282
	부가가치세	15,763,791	15,536,363	감)227,428
	계	173,401,710	170,900,000	감)2,501,710

Ⅳ		심의결과

□ 심의 내용

❍ 설계변경 타당성 여부

❍ 계약물량 증‧감 적정 여부

❍ 제경비 적용 적정 여부

□ 심의결과

❍ 설계변경 타당성 : 타당함

❍ 물량 증‧감 공종 수량산출 적정성 : 적정함

❍ 각종 제반 규정 준수여부 : 적정하게 준수

Ⅴ		조치의견

□ 상기와 같이 설계변경 심의 결과(타당함)에 따라,

□ 우리 정수센터 계약부서인 행정관리과에 변경계약 의뢰하여 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경 심의 요청 및 결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 산업안전보건관리비 사용내역서 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 및 산업안전보건관리비 검토결과서 각 1부.  끝.