문서번호	급수운영과-13310
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정원훈		전동근	09/14 최춘근
협조

설계변경(1차) 심의회 결과보고

(’21년 대치1동 외 14개동 상수도공사)

2021.  09.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(1차) 심의회 결과보고

(’21년 대치1동 외 14개동 상수도공사)

「2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사」관련 신규공정 및 물량변경 등이 발생하여 아래와 같이 심의회를 개최하고 결과를 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: ***********************

□ 공사기간: 2021.04.30. ∼ 2022.05.02.

□ 공사규모

○ 당초: D13~300mm, L1,448m

○ 변경: D13~300mm, L1,523m

□ 도 급 액: *************

□ 도 급 자: **************

Ⅱ		설계변경 사유

□ 신규공종 발생 및 물량변경 등

○ 신규공정 발생[부단수천공 분기점분기(400/25mm)] 외 36개 공정

○ 시공물량 변경(나사조임식이음관 철거 등)

□ 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
*******	***********	***********	****
*******	***********	***********	*
******	**********	**********	*

Ⅲ		심의위원회 의견

□ 공 사 명: 2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사

□ 심의일시: 2021. 09. 13.(월) 16:00

□ 심의장소: 강남수도사업소 4층(급수운영과)

□ 심의의견: 설계변경 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
***	******	********	***	***
		********
		********
***	******	********	***	***
		********
		********
***	******	********	***	***
		********
		********
***	******	********	***	***
		********
		********
***	*****	********	***	***
		********
		********

Ⅳ		조 치 계 획

□ 상기 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행하코자 합니다.

붙임  1. 심의의견서 1부

2. 설계내역서(변경) 1부.  끝.