문서번호	시설관리과-22154
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
조병철		유광창	09/14 송병욱
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

공사 실정보고에 따른 검토 보고

2021. 9.

동부수도사업소

[시설관리과]

공사 실정보고에 따른 검토 보고

「‘21년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」현장에서 발생된 불량토사(폐토석)에 대한 실정보고 검토내용을 보고 드림

□ 근  거

○ 공사현장 실정보고서[건양 2021-25, 2021.9.10.]

- ****************

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요: 밸브 및 변실정비 250개소, 소화전보수 82개소

○ 공사기간: 2021. 5.12. ~ 2022. 4.30.

○ 도 급 자: **************

○ 도 급 비: *********

□ 보고내용

○ 상수도시설물 보수공사시 발생되어 중간집하장에 적치된 터파기 토사중 일부에 골재 및 폐기물 혼합등 토사상태가 불량함에 따라 매립토사로 반출이 불가하므로 처리대책이 요구됨.

***************

******

□ 조치계획

○ 외부 반출이 불가함에 따라 우리 사업소에서 시행중인 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 건설폐기물처리용역 업체에 우선 폐토석으로 폐기물 반출토록 하고 추후 설계변경시 정산처리 하고자 함.

붙임  공사현장 실정보고서 1부.  끝.