문서번호	정수시설과-8099
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
송재홍		09/14 이천영
협 조

「활성탄흡착지 스트레이너 및 신축관 이음 설치공사」

설계변경 사항 보고

2021.  9.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

「활성탄흡착지 스트레이너 및 신축관 이음 설치공사」

설계변경 사항 보고

「활성탄흡착지 스트레이너 및 신축관이음 설치공사」 시행 중 설계변경 사항이 발생되어 보고합니다.

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 활성탄흡착지 스트레이너 및 신축관 이음 설치공사

❍ 계약기간 : 2021. 8. 23. ~ 2021. 9. 16.

❍ 계 약 자 : (주)협진엔지니어링 대표 조중현

❍ 계약금액 : 금23,774,550원

Ⅱ		변경 내용

❍ 신규공종 추가

- 스트레이너 설치를 위하여 난간 철거·설치 및 앵커볼트 설치

- 신축관이음 철거 및 신설 인력 부설

- 스트레이너 받침대 설치

❍ 물량 감소

- 사이트글라스 감소 20개 → 10개

- 사이트글라스 감소로인한 플랜지접합, 스텐볼트너트, 와샤 수량 조정

❍ 계약금액 변경(조정) 내역

(단위:원)

구분	계약금액	변경 금액	비고
공급가액	21,613,235	23,707,000
부가가치세	2,161,323	2,370,800
계	23,774,550	26,078,800	증)2,304,250

※ 세부변경 사항 : 붙임(설계변경 내역서) - 제경비 포함

Ⅲ		조치 의견

❍ 설계변경 심의 위원회 개최 후 설계 변경 계약 시행.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서 1부. 끝.