문서번호	급수운영과-13329
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
차승현		이승우	09/14 최춘근
협조

설계변경(1차) 심의회 결과보고

(2021년 신사동 외 6개동 상수도공사)

2021. 9.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(1차) 심의회 결과보고

(2021년 신사동 외 6개동 상수도공사)

「2021년 신사동 외 6개동 상수도공사」관련 신규공정 및 물량변경 등이 발생하여 아래와 같이 심의회를 개최하고 결과를 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: ***********************

□ 공사기간: 2021.3.26. ∼ 2022.6.30.

□ 공사규모

○ 당초: D=13~300mm, L=2,689m

○ 변경: D=13~300mm, L=2,689m

□ 도 급 액: **************

□ 도 급 자: ***********

Ⅱ		설계변경 사유

□ 신규공종 발생 및 물량변경 등

○ 신규공정: 강관접합(기계 300mm, 야간) 외 9개 공종

○ 물량변경

- 물량 증가: 보도용블록 인력철거 외 48개 공종

- 물량 감소: 주철관 절단공(100mm) 외 40개 공종

□ 설계변경 내역                                     (단위: 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
도 급 비	***********	***********	************
공급가액	***********	***********	*
부가가치세	**********	**********	*

Ⅲ		심의위원회 의견

□ 공 사 명: 2021년 신사동 외 6개동 상수도공사

□ 심의일시: 2021. 9. 14.(화) 14:00

□ 심의장소: 강남수도사업소 4층(급수운영과)

□ 심의의견: 설계변경 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
***	******	********	****	***
		********
		********
***	******	********	***	***
		********
		********
***	******	********	***	***
		********
		********
***	******	********	***	***
		********
		********
***	******	********	***	***
		********
		********

Ⅳ		조 치 계 획

□ 상기 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행하코자 합니다.

붙임  1. 심의의견서 1부

2. 설계내역서(변경) 1부.  끝.