투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	AI지원센터 건립공사 관급자재(레미콘) 납품기한 연장요청

우리 본부에서 추진 중인『AI지원센터 건립공사(1차)』관련하여 관급자재 레미콘의 납품기한을 아래와 같이 연장 요청합니다.

1. 납품기한 연장요청 내용(※ 규격 및 수량 변경없음)

구분	납품요구번호	납품기한		비 고
		당 초	변 경
레미콘 (30111505)	12-21-1-60845-00	2021. 10. 30.	2022. 10. 30.	************************
	12-21-1-67907-00	2021. 10. 30.	2022. 10. 30.	*********
	12-21-1-67908-00	2021. 10. 30.	2022. 10. 30.	*****

2. 연장 사유: 공정진행에 따른 관급자재의 적기 반입을 위함.

붙임  1. 분할납품통지서(레미콘 협동조합) 1부.

2. 배정변경통보서(신일) 1부.

3. 분할납품통지서(삼표, 쌍용) 1부.  끝.

	건축부장
주무관	조은주		환경시설과장	정채문		건축부장	09/15 신명승
협조자
시행	건축부-14914	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 중구 세종대로 110 주택건축본부 건축기획과 녹색건축팀	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-7105	/전송	02-2133-0750	/		/	부분공개(5)