문서번호	수상안전과-5823
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	수상안전과장	운영부장
최윤정	이원군	09/15 이상이
협 조
	수상기획과장		박인수

「2021년 한강아라호」

선박안전검사(중간검사) 계획

2021. 9.

한강사업본부

(수상안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■	한국선급(KR)검사
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

한강아라호 선박안전검사(중간검사) 계획

한강아라호 선박안전검사의 기준일에 따라 중간검사 및 수리계획을

수립하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

○ 선박안전법 제9조(중간검사)

○ 선박안전법 시행규칙 제31조(검사의 준비 및 서류제출의 완화 등)

- 여객선의 입거 또는 상가 준비를 수중검사 준비로 갈음

추진대상

선명	선체규모(m) (길이, 폭, 깊이)	톤수	속도	승선정원	건조일
한강아라호	55.5 x 12 x 2.5	688톤	10노트	310명	’10.10.20.

○ 운영자 : 주식회사 수 (대부기간:2020.9.1.~2021.10.22.)

- 수상기획과-5309(2021.8.23.)호 : 임대기간 연장 검토보고

추진기간

○ 검사기간 : 2021.10.23. ~ 11.7(15일)

- 선박안전법에 따른 검사기준일이 2021.11.18.(전후3개월)로써,

임대업체(주식회사 수)의 운영일정 및 임대연장기간 고려하여 실시

소요예산 : 금19,800천원

Ⅱ		추 진 계 획

검사계획

○ 검사종류 : 제1종 중간검사

○ 검사기관 : 한국선급(KR) 서울지부

○ 검사장소 : 여의도 임시 선착장

○ 검사방법 : 수중검사

- 선체검사는 수중검사(KR승인업체)로 수검

- 기관검사는 주기관 및 발전기 안전장치 작동상태 점검

○ 소요예산 : 총3,000천원

검사를 위한 수리 계획

○ 선체검사 준비

- 선박 선저 외판 크리닝 후 수중 검사 준비

- 소화설비, 무선설비, 구명장비, 구명설비, 항해계기 점검 준비

- 각종 장비 작동 상태 점검 준비

- 쇼파 커버 및 블라인더 부품 교체 등

○ 기관검사 준비

- 주기관, 발전기 안전장치 작동상태 점검 및 시운전 준비

· 주기관 : 두산중공업 4V222TIH 800PS x1800RPM x 2대

· 발전기 : CUMMINS ONAN MDDCE x 3대

- 주배전반 등 절연저항 시험

○ 추진일정

- ’21. 10. 01. ~ 10. 10. : 선박안전검사 신청

- ’21. 10. 23. ~ 10. 28. : 선저 클리닝(잠수) 작업

- ’21. 10. 29. ~ 11. 15. : 선체·기관 정비 및 검사, 시운전

○ 소요예산 : 금16,800천원

- 예산과목 : 한강 관공선 등 운영 및 관리, 공공운영비(100-201-01)

(단위:천원)

구분	작업업체	지출방법	업체 선정 사유	산출내역 및 예산액
합 계				16,800
수중검사	대한수중공사	일상경비	고도의 전문성과 안전성이 요구 되는 사항으로 다년간 경험이 풍부한 KR 승인업체	- 수중클리닝작업 6,600 - 수중검사 2,200
기관수리	화창종합디젤		전문성이 요구되는 사항으로 발전기 Cummins대리점으로써 검사준비 및 수리 전문 업체	- 주기관 안전장치 점검 1,000 - 발전기 안전장치 점검 1,000
기타수리	각 전문업체		엘리베이터, 절연저항, 쇼파 커버 교체, 블라인더 부품 교체등 전문업체	- 엘리베이터 점검 200 - 전기 절연저항 검사 700 - 쇼파 커버 교체 4,500 - 블라인더 교체 600

Ⅲ		행 정 사 항

선박 안전 검사 : 한국선급(KR), 서울지부

붙임  선박검사증서 1부, 견적서 4부.  끝.