문서번호	도시철도설비부-8621
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	정보통신과장		도시철도설비부장		도시철도계획부장		도시철도계획부장	도시기반시설본부장
유홍근	김이곤		김중영		정대현		직무대리	09/15 이정화
협 조

별내선(8호선연장)

철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치 재발주 검토보고

2021. 9.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

별내선(8호선연장)

철도통합무선통신망 구매설치 재발주 검토보고

별내선 철도통합무선망(LTE-R) 사업 입찰결과 무응찰로 2회 유찰된 바, 별내선 적기 개통을 위해 사업규모를 일부 조정하여 재발주하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 별내선(8호선연장) 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치

○ 사업기간 : 계약일로부터 ‘23. 12. 31.

○ 계약방법 : 조달발주(협상에 의한 계약)

○ 사업예산 : ********

○ 사업내용 : ***************************************************

○ 사업구간 : 별내선 전구간(서울시+경기도) 12.9km, 6개 정거장

- 사업근거: 협약서 제4조 2항 의거, 별내선 전구간 정보통신 관급자재는

서울시에서 구매설치

* LTE-R(Long Term Evolution–Railway): 철도통합무선통신망으로 관제센터, 승무원, 역무원, 시설관리 직원 등 서로 열차운행에 대한 음성, 데이터, 영상 등 정보교환

□ 추진경위

○ ’21. 4.  조달구매 의뢰

○ ’21. 6.  입찰공고(무응찰로 1회 유찰)

○ ’21. 7.  재 공 고(무응찰로 2회 유찰)

○ ’21. 8~9. 무응찰에 따른 관계 기업 면담(5회)

□ 기업의견

○ *********************************************************************

****************************************

- `21년 국가철도공단 철도통합무선망 발주 사업

· 경북선 36,649백만원, 경춘선 17,238백만원, 경인선 30,433백만원

○ *************************************

□ 검토의견

○ **********************************

- ***************************************************************************************************

**************************************************

*************************

- *************************************** ************************************  *************

※ ***************************

‣**************************************

************************

‣**************************************

(****************************)

○과업내용 조정

구 분	조정내역		비고
	변경 전	변경 후
2.2.1 기술사항 2)관제연동	- **********************************	- **********************************
2.2.2 기술사항 가.구성및수량	- ********************************	- ***************** **************
1.22.6 일반사항 납품 및 설치	- *******************************************	- ***************************************
1.36.3 일반사항 보증	- ***************************	- ****************************************
1.1.4 기술사항 23)상호운용성	- ****************	- ******************************

□ 향후 추진일정

○ ’21.  9. 계약의뢰

○ ’21. 10. 입찰공고

○ ’21. 11. 제안서 평가 및 계약.

붙임 : 1. 제안요청서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.