문서번호	기반시설과-6244
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기반시설과장	시설부장	한강사업본부장
송하연	代김일문	박상보	09/15 황인식
협 조

- 한강변 보행네트워크 조성공사 -

제1회 설계변경 검토보고

2021. 09.

한강사업본부

(기반시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 한강변 보행네트워크 조성공사 -

제1회 설계변경 검토보고

『한강변 보행네트워크 조성공사』의 그동안 공사현장 실정보고 승인에(1차∼7차) 따른 공사감독자(서울시설공단) 설계변경 제출건에 대하여 다음과 같이 검토하고 보고드림.

1		추 진 근 거

◯ 실정보고 회신(기반시설과-1695호, 2021.3.15.)

◯ 실정보고(2차) 회신(기반시설과-2332호, 2021.4.7.)

◯ 실정보고(3차) 회신(기반시설과-2800호, 2021.4.27.)

◯ 실정보고(4차) 및 준공기한 연기요청 회신(기반시설과-4705호, 2021.7.15.)

◯ 실정보고(5차) 회신(기반시설과-4801호, 2021.7.19.)

◯ 실정보고(6차) 회신(기반시설과-5222호, 2021.8.4.)

◯ 실정보고(7차) 회신(기반시설과-5793호, 2021.8.27.)

◯ 변경설계서(1회) 제출(공사감독3처-8613호, 2021.9.6.)

2		공 사 개 요

◯ 건    명 : 한강변 보행네트워크 조성공사

◯ 위    치 : 여의나루역 ∼ 동작역 간 수변 보행로 일대

◯ 규    모 : 보행로 환경개선 6개구간 5.6km, 연결거점 조성 9개소

◯ 시행부서 : 한강사업본부(정책부서 도시공간개선단)

◯ 설 계 사 : 랩디에이치 조경설계사무소 대표 최영준

◯ 공사기간 : 2020. 12. 9. ~ 2021. 12. 31.

◯ 공사금액 : 5,757백만원(도급비 4,677백만원, 관급비 1,080백만원)

- 도급비 총차 4,677백만원(1차 3,000백만원, 2차 855백만원, 3차 822백만원)

◯ 도 급 자 : 에이스건설주식회사 대표 권보식 외 1

◯ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독3처

3		설계변경 검토

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
조경시설물	전망휴게쉼터1 구조검토 반영 전망휴게쉼터1 : 2개소 → 0 전망휴게쉼터1-1(5800×10450) : 0 → 1개소 전망휴게쉼터1-2(5100×10450) : 0 → 1개소
	전망휴게쉼터2,3 현장여건 및 동선 연결을 위한 데크 규격 조정 전망휴게쉼터2 : 1개소 → 0 전망휴게쉼터2-1(60.22㎡) : 0 → 1개소 전망휴게쉼터3 : 1개소 → 0 전망휴게쉼터3-1(46.289㎡) : 0 → 1개소
	개비온옹벽 전문가 자문의견 반영 개비온옹벽(H900) : 300m → 0 개비온옹벽(H900) : 315.8m → 0
	신설데크보행로 안전보강 및 디자인 변경 신설데크보행로(W3000) : 22경간 → 0 신설데크보행로-1(W3000) : 0 → 22경간 신설데크보행로-2(32.6㎡) : 0 → 1개소 신설데크보행로 조적화단(14.734㎡) : 0 → 1개소 신설데크보행로 계단 : 1개소 → 0 신설데크보행로 계단-1(31.036㎡) : 0 → 1개소 안전난간B(2000×1200) : 39.5경간 → 0 안전난간B-1(2000×1200) : 0 → 70경간 맥문동(7∼10분얼) : 0 → 6258본
	전망휴게쉼터4 기초 부등침하 방지를 위한 줄기초 반영 전망휴게쉼터4 : 1개소 → 0 전망휴게쉼터4-1(118.4㎡) : 0 → 1개소
	안전난간C 구조보강 안전난간C(2000×1200) : 19.39경간 → 0 안전난간C-1(2000×1200) : 0 → 19.39경간
	노후 파고라 철거 및 신규 설치 파고라(4200×4200×3500) : 0 → 1조
	벚꽃둔덕산책로 우배수시설 개선 벚꽃둔덕길 우배수(집수정 800×800) : 0 → 9조 벚꽃둔덕길 우배수(측구수로관 300×300) : 0 → 242m 벚꽃둔덕길 우배수(PE이중벽관 D300) : 0 → 50m 스틸엣지(T3) : 0 → 283m

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
조경시설물	노량대교 하부 낙수 피해 방지 우배수시설 설치 배수관(D150) : 0 → 1식
연결거점 1	유지관리 용이 및 사면보호를 위한 잔디 식재 롤잔디(잔디블럭용, 켄터키블루그라스) : 154.4㎡ → 0 롤잔디(잔디블럭용, 한국잔디) : 0 → 154.4㎡ 잔디(평떼) : 225.5㎡ → 410.78㎡
	부등침하 방지를 위한 기초 및 몰탈 보강 PC콘크리트블럭 계단형-01(정방형) : 58개소 → 0 PC콘크리트블럭 계단형-01-1(정방형) : 0 → 58개소 PC콘크리트블럭 계단형-01(부정형) : 2개소 → 0 PC콘크리트블럭 계단형-01-1(부정형) : 0 → 2개소 PC콘크리트블럭 계단형-02(정방형) : 63개소 → 0 PC콘크리트블럭 계단형-02-1(정방형) : 0 → 63개소 PC콘크리트블럭 계단형-02(부정형) : 4개소 → 0 PC콘크리트블럭 계단형-02-1(부정형) : 0 → 4개소 PC콘크리트블럭 포장형(정방형) : 110개소 → 0 PC콘크리트블럭 포장형-1(정방형) : 0 → 110개소 PC콘크리트블럭 포장형(부정형) : 9개소 → 0 PC콘크리트블럭 포장형-1(부정형) : 0 → 9개소 콘크리트일반경계석(150×150×1000) : 39.3m → 162.52m PC콘크리트블럭 앉음벽 : 8개소 → 0 PC콘크리트블럭 앉음벽-1 : 0 → 8개소 화강경계석(녹지, 100×100×1000) : 0 → 31.4m
연결거점 2	PC콘크리트블럭 침수시 부력 방지시설 설치 및 그늘목 식재 구멍뚫기 : 0 → 144개소 평철설치(T3) : 0 → 1식 이팝나무(H4.0×R15) : 0 → 9주 부직포깔기 : 0 → 112.2㎡
연결거점 3	안전사고 방지를 위한 옹벽시설 개선 스틸엣지A(T3) : 49.9m → 45m 스틸엣지B(T3) : 44.7m → 40m 스틸엣지C(T3) : 24.2m → 22m 옹벽(1500×4800) : 1개소 → 0 옹벽-1(700×24300) : 0 → 1개소 매너블럭쌓기 : 0 → 21m
	노량대교 낙수 피해 방지 우배수시설 설치 집수정(600×600) : 0 → 3조 PE집수 : 0 → 1조 측구수로관(300×300) : 0 → 14m PE이중벽관(D250) : 0 → 32m
	현장여건에 맞게 장비규격 조정 절취(토사, BH0.7) : 652.748㎥ → 0 절취(토사, BH0.4) : 0 → 652.748㎥ 토사운반(2.5톤) : 652.748㎥ → 0 토사운반(4.5톤) : 0 → 652.748㎥
연결거점 4	안전휀스 설치 및 노출콘크리트 미관향상 목재 마감 앉음벽(10.482㎡) : 0 → 1개소 평철난간 : 0 → 34경간
연결거점 5	부등침하 방지를 위한 소일시멘트 보강 소일시멘트배합(T300) : 0 → 35.07㎡
연결거점 7	콘크리트 기초 보강, 플랜터 규격 조정 및 녹지대 체육시설 등 정비 수크렁(10cm) : 460본 → 896본 맥문동(7∼8분얼) : 0 → 539본

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
연결거점 7	털수염풀(10cm) : 0 → 918본 노루오줌(10cm) : 0 → 130본 호스타(2∼3분얼) : 0 → 61본 나무수국(H1.0×W0.6) : 0 → 20주 가막살(H1.0×W0.45) : 0 → 30주 벽돌벽 가 : 2개소 → 0 벽돌벽 가-1 : 0 → 2개소 벽돌벽 나 : 2개소 → 0 벽돌벽 나-1 : 0 → 2개소 벽돌벽 다 : 2개소 → 0 벽돌벽 다-1 : 0 → 2개소 벽돌벽 라 : 1개소 → 0 벽돌벽 라-1 : 0 → 1개소 사고석하단벽(CBW1) : 2개소 → 0 사고석하단벽(CBW1)-1 : 0 → 2개소 사고석하단벽(CBW2) : 2개소 → 0 사고석하단벽(CBW2)-2 : 0 → 2개소 사고석하단벽(CBW3) : 2개소 → 0 사고석하단벽(CBW3)-3 : 0 → 2개소 쇄석수로 : 29.6m → 0 난간 : 8경간 → 19.5경간 콘크리트포장(T70) : 3.97㎡ → 0 콘크리트포장A(T150) : 0 → 96㎡ 콘크리트포장B(T150) : 0 → 140.86㎡ 유공관 : 0 → 64m 보차도용콘크리트블럭포장(T80) : 0 → 148.85㎡ 난간기초 : 0 → 80.6m 매너블럭쌓기 : 0 → 8.58㎡ 화강경계석 : 0 → 30m
연결거점 8	사면과 수목 훼손 방지를 위한 옹벽시설 등 조정 제물치장콘크리트1 : 1개소 → 0 제물치장콘크리트1-1 : 0 → 1개소 제물치장콘크리트2 : 1개소 → 0 제물치장콘크리트2-1 : 0 → 1개소 제물치장콘크리트3 : 1개소 → 0 제물치장콘크리트3-1 : 0 → 1개소 제물치장콘크리트4 : 1개소 → 0 제물치장콘크리트4-1 : 0 → 1개소 제물치장콘크리트5 : 1개소 → 0 제물치장콘크리트5-1 : 0 → 1개소 제물치장콘크리트6 : 1개소 → 0 제물치장콘크리트6-1 : 0 → 1개소 제물치장콘크리트7 : 1개소 → 0 제물치장콘크리트7-1 : 0 → 1개소 제물치장콘크리트8 : 1개소 → 0 포천석A : 50개소 → 0 포천석A-1 : 0 → 110개소 포천석통석포장 : 17개소 → 0 포천석통석포장-1 : 0 → 10개소 콘크리트옹벽 : 80.1m → 0 콘크리트옹벽-1 : 0 → 46.2m 배수용자갈포장 : 80.5m → 46.2m 스틸엣지(T3) : 66.5m → 0
시설물설치	P1구간 자연형호안 식생 보호 사석호안 : 391.3㎡ → 0
	P1구간 훼손 포장 철거 및 블록 포장, P!∼P2구간 경계석 합판거푸집 제외 보차도용콘크리트블럭포장A : 1002.43㎡ → 1014.72㎡ 보차도용콘크리트블럭포장B : 762.03㎡ → 821.93㎡ 보차도용콘크리트블럭포장C : 555.24㎡ → 541.44㎡ 화강경계석A : 4344m → 3195.7m 화강경계석A-1 : 0 → 1148.3m 화강경계석B : 34m → 82.4m 엘브엣지(H108) : 0 → 282.4m

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
시설물설치	마사토포장 보강 및 불필요 구간 제외 마사토포장(경화흙표층, T120) : 464.12㎡ → 0 마사토포장-1(경화흙표층, T120) : 0 → 440.36㎡
	P2구간 훼손 포장 철거하여 재포장 콘크리트 절단 : 0 → 1898.3m 콘크리트 포장 : 2503.12㎡ → 0 콘크리트 포장-1(T150) : 0 → 1004.18㎡ 아스콘포장(T50) : 0 → 2516.63㎡
철거이설	P2구간 포장 두께 실측 반영 아스팔트포장 철거 : 6962.44㎡ → 3604.86㎡ 아스팔트포장 철거-1 : 0 → 1660.77㎡ 콘크리트포장 철거A : 0 → 3368.84㎡ 호안블럭 철거 : 0 → 336.4㎡ 콘크리트포장 철거(T500) : 0 → 80㎡ 경계석 철거 : 125.71㎡ → 147.51㎡
	7·8거점 노후 정자 철거 및 설치, 운동시설 등 이설 정자 철거 및 설치 : 1개소 → 2개소 목재플랜터 철거 : 30m → 66.9m 운동기구 이설 : 33개소 → 37개소
	P1구간 발생토 1거점으로 운반 토사운반(0.3km) : 0 → 308.83㎥ 토사운반(0.6km) : 0 → 399.66㎥
지적사항	기술심사담당관 지적사항 검토의견 반영 데크공사 기타할증(능률저하) 40% 제외(전망데크1·2·3) 조경석 놓기(쌓기) → 유용석 놓기(쌓기) 시멘트 운반비 경비로 적용
부대공사	공사 안전 및 민원 해소를 위한 보행안전도우미 배치 보행안전도우미 : 0 → 287명
	공원 이용자 안전을 위한 가림막 등 안전시설 설치 가림막휀스(H2.0) : 0 → 300경간 공사안내판 : 1개소 → 5개소 공사안내 현수막 : 1개소 → 15개소 공사안내 입간판 : 1개소 → 33개소
	전망휴게쉼터1 하상작업(기초 및 구조물) 바지선 사용 바지선 임대 : 0 → 2일
관급자재	관급자재 변경 조경 레미콘(25-18-8) : 108㎥ → 104.41㎥ 레미콘(25-21-8) : 421㎥ → 343.19㎥ 레미콘(25-24-8) : 181㎥ → 119.69㎥ 하두우드(이페) : 1203㎡ → 1327.66㎡ 시설물유지관리 레미콘(25-21-8) : 927㎥ → 902.24㎥ 아스콘(표층) : 94톤 → 396톤
물가변동	물가변동으로 인한 계약금액 조정 물가변동 조정금액 총차 : 94,107,000원(부가세 포함) (1차 48,171,000원, 2차 19,224,000원, 3차 26,712,000원)	기반시설과-5208호(2021.8.4.)

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
차수공정	차수별 공사물량 조정 1차공사 보행로 P1∼P6 → 보행로 P1∼P2 연결거점 1∼3 → 연결거점 1∼5, 7∼8 2차공사 보행로 → 보행로 P5∼P6 연결거점 4∼8 → 연결거점 9 3차공사 보행로 → 보행로 P3∼P4 연결거점 9 → 연결거점 6
폐기물처리	공사물량 변경에 따른 폐기물 처리물량 변경 폐아스콘 : 1646.91톤 → 1248.16톤 폐콘크리트 : 874.88톤 → 2608.69톤 건설폐재류 : 3675.39톤 → 3242.71톤 폐목재 : 4.29톤 → 8.53톤 폐기물운반 : 3166.99톤 → 4002.07톤

4		설계변경 금액

구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
총 차	공급가액	4,252,201,364	4,463,591,919	증 211,390,555
	부 가 세	425,220,136	446,359,191	증 21,139,055
	도 급 비	4,677,421,500	4,909,951,110	증 232,529,610
	관 급 비	1,068,529,638	1,100,619,205	증 32,089,567
	총공사비	5,745,951,138	6,010,570,315	증 264,619,177
구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
1 차	공급가액	2,727,272,728	2,896,001,919	증 168,729,191
	부 가 세	272,727,272	289,600,191	증 16,872,919
	도 급 비	3,000,000,000	3,185,602,110	증 185,602,110
	관 급 비	1,068,529,638	1,100,619,205	증 32,089,567
	총공사비	4.068,529,638	4,286,221,315	증 217,691,677
구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
2 차	공급가액	777,733,966	802,570,000	증 24,836,034
	부 가 세	77,773,396	80,257,000	증 2,483,604
	도 급 비	855,507,362	882,827,000	증 27,319,638
	관 급 비
	총공사비	855,507,362	882,827,000	증 27,319,638
구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
3 차	공급가액	747,194,670	765,020,000	증 17,825,330
	부 가 세	74,719,467	76,502,000	증 1,782,532
	도 급 비	821,914,138	841,522,000	증 19,607,862
	관 급 비
	총공사비	821,914,138	841,522,000	증 19,607,862

5		검 토 의 견

◯ 그동안 실정보고 승인건(1차∼7차)에 대한 설계도서 검토 및 현장

확인 결과 사실과 다름이 없어 설계변경 승인코자 하며,

◯ 증액 공사비(264,619,177원)는 본공사 집행잔액(1,523,034,380원)에서 사용코자 함.

- 예산과목 : 도시공간개선, 도시공간 환경수준 향상, 한강변 보행네트워크 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

6		행 정 사 항

◯ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(총무과)

붙임   1. 설계변경(1회) 제출  1부.

2. 차수별 실정보고 회신  1부.

3. 설계변경 심의결과(서울시설공단)  1부.

4. 제비율 검증확인서(기술심사담당관)  1부.

5. 물가변동 계약금액 조정회신  1부.

6. 설계변경 내역서  각 1부. 끝.