문서번호	급수운영과-13388
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이상욱		전동근	전결 09/15 代이승우
협조

사토장 변경 검토보고

(2021년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전 보수공사)

2021.  9.

강남수도사업소

(급수운영과)

사토장 변경 검토보고

(2021년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전 보수공사)

“2021년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사”관련하여 ㈜다올토건(대표 유긍하)으로부터 사토장 위치변경 실정보고가 접수되어 검토보고 드림

□ 관련공문

○ 토사 반입불가 회신【수도권매립지관리공사 매립부-2283(‘21.9.3.)】

○ 실정보고 제출(사토장 변경)【DO-104(‘21.9.13.)】

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전보수공사

○ 공사기간 : 2021. 7. 2.~ 2022. 7. 1.

○ 도 급 액 : 금964,091,000원

○ 도 급 자 : ㈜다올토건 대표 유긍하

○ 공사개요 : 밸브 교체 D=80~700mm, 178개소

변실 설치 D=80~700mm, 234개소

□ 변경사유

○ 수도권매립지로부터 토사 반입불가에 따른 사토장 변경필요

- 당초 설계도서에 지정된 사토장(수도권매립지)에 대해 현장토사 반입요청 하였으나, 수도권매립지관리공사로부터 반입토사불량 회신으로 발생토사 반입이 어려운 실정임

□ 검토내용

○ 대체 사토장 선정

구분	위치	거리
당초	수도권매립지	57.2km
변경	경기도 여주시 산북면 금품1로 245	44.7km

- 개발행위허가증 및 기타서류 적정확인

○ 공사비 증·감 비교

(단위 : 원)

공종	수량	단위	당초 (57.2km)		변경 (44.7km)		비고
			단가	금액	단가	금액
잔토처리 (집하장→매립지)	425	㎥	19,720	8,381,000	17,104	7,269,200	감)1,111,800

- 변경된 위치의 운반거리 감소로 인한 예산절감 (관련공종 13.3% 감액)

□ 행정사항

○ 사토장 변경에 따른 승인통보

- 변경된 사토장에 대하여 ㈜다올토건(대표 유긍하) 및 ㈜대한콘설탄트(대표 이영민)에 승인통보

○ 해당공종 설계변경 적용시행

- 향후 설계변경 시 금액 증·감분에 대하여 적용시행

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 실정보고 제출(사토장변경) 1부.  끝.