투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(2021년 토건시설물 정비공사)

1. 시설과-5125(2021. 9. 7.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건명: 2021년 토건시설물 정비공사

**************************

*******************************************

라. 공사기간: 2021. 5. 3.~ 2021. 12. 31.

마. 변경내용: 내역서 변경(금액변경 없음)

○ 조합페인트칠: 0 ⟶ 2,340

○ 차선도색(융창식)문자기호: 0 ⟶ 360

○ 원형맨홀설치: 7 ⟶ 2

○ 빗물밭이 설치: 10 ⟶ 2

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		재무팀장	양근대		공원운영과장	최석환		서부공원녹지사업소장	09/13 代최석환
협조자
시행	공원운영과-10928	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)