투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]위례선 답답

양문석님 평소 시정에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

귀하께서 질의하신 사항에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

1. 위례선 트램이 다닐 라인은 이미 정해져있고 해당 자리에 깔기만 하면 되는것으로 알고있는데 45개월로 공기가 결정된 구체적인 근거를 제시바랍니다.

- 우리시는 위례선의 '24 년말 개통을 목표로 추진하였으나 , LH 광역교통개선부담금과 위례선 기본계획 용역결과 총사업비에 차이가 있어 총사업비 추가 확보 및 국토교통부 승인을 위한 협의 등에 시일이 추가로 소요되었고, 공사기간은 건설기술심의에서 심도 있는 검토 결과 45개월로 결정되어 부득이 '25 년 9 월 개통으로 목표를 조정하였습니다.

공사기간에 대하여는 건설기술심의(공사기간 적정성)에서 국내 최초로 시공되는 트램 사업임을 감안, 공사장 및 주변지역 안전관리와 품질관리를 위해 적정 공사기간을 45개월로 결정하였음을 알려드리오니 이해 있으시길 바랍니다.

2. 트램 차량 입찰이 국내업체 무응찰 등으로 계속해서 유찰되고 있는데, 차량 확보가 늦어져 개통이 지연될까 심히 우려됩니다. 이에 대한 대책과 현재까지 지연된 상황에 대한 만회 방안을 제시바랍니다. 예산도 증액 바랍니다.

- 우리 시는“위례선 트램 차량 10편성 구매”건에 대해 조달구매 요청하여 ’21.05월 공고하였으나, ’21.08.19.(1차), ’21.09.01.(2차) 2회 무응찰 유찰 되었습니다.

무응찰 유찰에 따라 바로 국내 제작사와 면담을 실시하였으며 면담 결과에 따라, 대응방안에 대해 내부검토(규격, 예산 등) 중에 있습니다.

우리 시는 ’21년 내에 재구매 요청할 계획이며, 올해 안에 계약 체결하고자 하오니, 참고하여 주시기 바랍니다.

기타 더 궁금한 사항이 있으시면 1. 사업기간 관련 : 도시철도계획부(02-772-7159), 2. 트램구매 관련 : 도시철도설비부(02-772-7289)로 전화주시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							이은석			차량과장					강치석					도시철도설비부장					09/14 김중영
협조자				주무관						전용현
시행			도시철도설비부-8547									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 8층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		772-7289						/전송			772-7308					/													/	부분공개(6)