문서번호	박물관과-9953
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연	이병두	09/15 이성은

「삼청각 일화당 공연장 시설개선공사」

감리용역 시행계획

2020. 9.

문 화 본 부

(박물관과)

「삼청각 일화당 공연장 시설개선공사」

감리용역 시행계획

『삼청각 일화당 공연장 시설개선공사』의 효율적인 공사관리와 정교한 품질관리 및 철저한 안전관리를 위하여 전기‧통신‧소방공사 감리용역 시행계획을 검토하여 보고함

Ⅰ		공사개요 및 추진경위

□ 공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 삼청각 일화당 공연장 시설개선 공사

❍ 위    치 : 성북구 대사관로 3 삼청각 일화당

❍ 공사범위 : 일화당 지상2층 공연장

*****************************

*********************************************************

**********************************************

□ 추 진 경 위

❍	’21. 7. 1.	:	일화당 공연장 시설 개선계획(박물관과-7075, 2021.7.1.)
❍	’21. 7. 6.	:	일화당 공연장 시설개선 실시설계용역 착수
❍	’21. 7. 30.	:	공연장 시설개선 실시설계 자문회의
❍	’21. 8. 31.	:	공연장 무대설비 구매·설치 계약심사
❍	’21. 9. 3.	:	일화당 공연장 실시설계 도서 접수
❍	’21. 9. 14.	:	공연장 시설개선 설비분야 공사 발주계획

Ⅱ		용역 추진 계획

□ 용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 삼청각 일화당 공연장 개선공사 전기‧통신‧소방 감리용역

❍ 용 역 비 : ************(부가세 포함)

❍ 용역기간 : 착수일로부터 80일

- 공사기간 60일, 무대장비 설치15일, 시운전 기간 5일

❍ 과업내용 : 공연장 설비공사(무대설비 및 전기‧통신‧소방설비) 감리용역

- 삼청각 일화당 공연장 무대 음향‧영상‧조명‧기계 장치 설치시 물품 검수 및 설치공사, 시운전 등에 관한 감리업무

- 삼청각 일화당 공연장의 전력간선설비공사, 전등‧전열설비 공사, 전기 철거공사, 관급자재 등에 대한 전력기술관리법 규정에 의한 감리업무

- 삼청각 일화당 공연장의 통신설비공사, 자동화재 탐지설비 및 피난유도등 설치공사 등 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 규정에 의한 감리업무

□ 용역 발주 계획

□ 관련 자격 및 면허

- 전력기술관리법에 의한 종합 또는 전문감리업 등록 업체

- 정보통신 분야 자격 보유 업체 및 일반소방공사 또는 전문소방공사(전기,기계) 감리업 등록업체

□ 계약방법: 수의계약

- 수의계약 사유: 추정가격이 2천만원 이하 소액으로 조속한 사업 추진을 위해 서울시 공사 감리 경험이 많은 업체와 수의계약

· 「지방계약법 시행령」 제25조제1항 제5호 나목 및 제30조제1항

- 계약업체: **************************

· 주  소: ************************************

Ⅲ		행정사항 및 향후 추진

□ 행정 사항

□ 예산과목: 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 삼청각 리모델링, 시설비및부대비, 감리비

❍ 유관부서: 기술심사담당관, 재무과

□ 향후 추진

❍ ’21. 9.          : 기술용역 타당성 심사 의뢰(기술심사담당관)

감리용역 계약

❍ ’21. 10. ~ 11.: 공사 및 용역 시행

❍ ’21. 12.        : 무대설비 설치 및 시운전 / 용역 준공

붙 임  1. 감리용역비 산출서 1부.

2. 감리용역 과업내용서 1부.

3. 업체 관련 서류(사업자등록증, 면허)  1부.  끝.