문서번호	토목부-17666
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김종혁	한병찬	임춘근		09/15 김홍길
협 조

준공기한 연기 검토 보고

[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역]

2021. 9.

도시기반시설본부

토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

「 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역」 건설사업관리자 제출한 준공기한 연기요청에 대하여 검토 보고드림

※ 제일(발)2021-3106호(2021.09.13.)

□ 관련근거

❍ 서부간선도로 서울청 협의결과 제출 [제일(발)-2021-1474호(2021.05.11)]

❍ 서부간선도로 서울청 협의결과 제출 [제일(발)-2021-1856호(2021.06.07)]

❍ 준공기한 연기 신청 [제일(발)-2021-3106호(2021.09.13.)]

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서울특별시 영등포구 양평동(목동교) ~ 금천구 독산동(금천교)

❍ 규    모 : 일반도로화 8.1㎞, 친환경공간 조성 119천㎡

******************************************************************

************************************************

❍ 용 역 사 : ㈜유신, ㈜도화엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아,

㈜경동엔지니어링, ㈜도진엔지니어링

□ 추진경위 및 향후 추진계획

❍ ’19.07.16.	: 실시설계용역 착수 (전체분)

❍ ’19.11. ~ ’20.01. : 관계기관 협의 (노선변경, 자전거도로 양측 일방→편측 양방)

❍ ’20.02.29.	: 실시설계용역(2차분) 착수

❍ ’20.03.10.	: 실시설계 자문회의 (1차, 노선자문 등)

❍ ’20.04. ~ ’20.07. : 지반조사 및 현황/중심선 측량

❍ ’20.07.15.	: 실시설계 자문회의 (2차)

❍ ’20.08.26.	: 국회의원 현안사항 보고

❍ ’20.11.24.	: 특정기술 선정심사위원회(1차)

❍ ’21.2.~’21.3.	: 실시설계 경제성심사(VE)

❍ ’21.03.08.	: 구로구 현안사항 보고(윤건영 국회의원 보좌관, 이호대 시의원 등)

❍ ’21.03.23.	: 특정기술 선정심사위원회(2차)

❍ ’21.04.07.	: 실시설계 하천점용 사전협의(1차)(서울지방국토관리청)

❍ ’21.04.29.	: 실시설계 하천점용 사전협의(2차)(       ``         )

❍ ’21.05.31.	: 실시설계 하천점용 사전협의(3차)(       ``         )

❍ ’21.06.01.	: 설계안전성검토 완료 (조건부 적정)

❍ ’21.06.03.	: 공기적정성 심의 (조건부 채택)

❍ ’21.06.11.	: 주민설명회 (구로구 신도림동, 구로1동)

❍ ’21.06.22.	: 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 (조건부 시행)

❍ ’21.07.19.	: 실시설계 하천점용 사전협의(4차)(       ``         )

*********************

❍ ’21.08.25.	: 실시설계 하천점용 사전협의(5차)(       ``         )

******************

❍ ’21.09.~ 10.	: 하천점용협의 완료(예정), 교통규제심의 완료(예정)

❍ ’21.11.30.	: 실시설계용역 준공(예정)

□ 건설사업관리기술자 검토 결과

❍ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

- 책임건설사업관리기술자 오태진

**********************

*******************************************************************

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 변경사유

***********************************************************************************************************

**********************************************************

□ 조치의견

❍ 상기 건설사업관리기술자의 준공기한 연기 요청이 적정함으로 준공기한을 연기처리코자 함

붙임 : 1) 준공기한 연기신청서 1부.(건설사업관리 검토의견서, 합의각서)

2) 합의각서_감독경유 1부. 끝.