투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「천호공원 노후시설 정비공사」준공기한 연장 의뢰

1. 시설과-4552(2021.9.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『천호공원 노후시설 정비공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 천호공원 노후시설 정비공사

나. 도 급 액 : 금377,785,500원

다. 기    간 : 2021. 7. 1. ~ 9. 28.

라. 도 급 자 : **************박영원

마. 준공기한의 연장

당초	변경	비고
2021. 7. 1. ~ 9. 28.(90일간)	2021. 7. 1. ~ 10. 13.(105일간)	연장 15일

바. 연기사유

- 공사 중 식재 및 광장 디자인 등 설계변경사항 발생에 따른 초화 및 시설물 수급

기간을 위한 공기연장 필요

- 설계변경 처리 및 정산 처리 등을 위한 소요일수 확보 등

사. 공사비 변경 : 해당없음

아. 지체상금 : 미부과

붙임  1. 준공 기한 연기 검토보고 1부.

2. 합의각서(천호공원 노후시설 정비공사) 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최규철		공원조성팀장	하종식		시설과장	09/16 박종수
협조자
시행	시설과-4564	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-2181-1169	/	ckc222@seoul.go.kr	/	부분공개(5)