문서번호	설비부-13384
결재일자	2021. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
허진		장재순	09/16 김호성
협조

『동부간선도로확장 (1,3공구) 전기공사』

설계변경 검토보고

2021.  9.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로확장(1,3공구) 전기공사』

설계변경 검토보고

『동부간선도로확장 1,3공구 전기공사』와 관련, 책임건설사업관리단의 설계변경 요청에 대하여 검토하고 보고드림

*******************************************************

******************************************************

□ 공사명 : 동부간선도로확장 1,3공구 전기공사

❍ 공사위치: 노원구 월계1교 ~ 의정부 시계

- 1공구: 초안산지하차도 인근 중랑천변 산책로·스포츠시설

- 3공구: 상계주공(1~3단지, 10·11단지) / 마들지하차도·수락고가차도

❍ 공사규모: 폭(4차로→6차로), 연장 6.85km(서울시 1.4km, 광역도로 5.45km)

- 1공구: 보안등 38본(LED 50W), 조명타워 1EA (LED100W×3)

- 3공구: 가로등기구 교체 144등, LED터널등 229등 설치

❍ 공사기간: 2021.05.03. ~ 2022.01.10.

❍ 공 사 비: *****************

❍ 감 리 사: ㈜동부엔지니어링

❍ 시 공 사: ㈜남경전설

□ 관련 근거

❍ 동부간선도로확장 1,3공구 전기공사 실정보고(설비부-13074호, `21.9.9.)

❍ 동부간선도로확장 1,3공구 전기공사 변경설계서 검토보고(동부엔지니어링
(발)2021-2455호, `21.9.13.)

□ 설계변경 내용                                (단위: 천원)

구 분	변 경 내 용	공 사 비			사 유
		당 초	변 경	증·감
직접공사비	장애인화장실 전원인입 보안등 추가설치 표찰공 교통안전시설 반영	*******	*******	******	설비부-13074호 `21.09.09.
간접공사비 (부가세 반영)	건강·연금보험료, 산업안전보건관리비 등	*******	*******	*****	직접공사비 증가로 인한 증액 (계약금액조정 검증시스템 검증)
한전불입금 대납분 정산		*	***	***	장애인화장실 전원 표준시설부담금
합 계		*******	*******	******

❍ 설계변경 현황                                      (단위: 원)

구 분	공 사 비			비고
	당 초	변 경	증·감
*****	***********	***********	**********	공사기간 변경없음

□ 건설사업관리기술자 검토의견

❍ 변경 설계도서를 검토한 결과 계약금액 조정이 적정한 것으로 판단됨

□ 보고자 검토의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경도서 검토의견 사항을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 총무부에 변경계약을 의뢰코자 함

붙 임 : 1. 감리단 변경설계서 검토의견서 1부.

2. 실정보고 사항 검토보고 1부.  끝.