투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	『2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)』 준공기한 연기요청

1.『2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)』에 대하여 아래      와 같이 준공기한 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

나. 요청내역 : 준공기한 연기

요청내용	당초	변경
준공기한	’21.7.16.~’21.9.23.	’21.7.16.~’21.10.22.

다. 귀책사유 : 서울시 (지체상금 미부과)

라. 연기사유 : 공사 계약서 및 입찰 공고상 준공기한이 서로 상이하여 입찰 공고상 준공기한으로 준공기한 연장필요

마. 공사금액 : 변경없음.

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 연기공문, 합의각서, 입찰공고문 각 1부.  끝.

	기전과장
주무관	최민규		주무관	이태근		기전과장	전결 09/16 석대창
협조자
시행	기전과-7921	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)3284-5470	/		/	부분공개(7)