문서번호	치수과-15921
결재일자	2021.9.16.
공개여부	비공개
방침번호

★주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
박철홍		문철		민병기		전결 09/16 최연우
협조

★ ◉

기성 검사(제2회) 검토 보고

【2021년 빗물받이 준설공사(단가계약)】

2021. 9.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( 시비 재배정 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

기성 검사(제2회) 검토 보고

【2021년 빗물받이 준설공사(단가계약)】

우리 구에서 시행중인 2021년 빗물받이 준설공사(단가계약)의 제2회 기성 확인 요청이 접수되어 아래와 같이 보고 드림

1			공사개요

공 사 명 : 2021년 빗물받이 준설공사(단가계약)

공사내용 : 빗물받이 흡입준설 11,720개소, 인력준설 20,780개소 등

공사기간 : 2021.03.09. ~ 2021.12.31.

도 급 비 : 금442,400,000원

계 약 자 : ㈜드호 대표 김석봉

2			보고내용

「2021년 빗물받이 준설공사(단가계약)」의 기성 확인 요청(2회) 사항에 대하여 관련 서류 및 현장 확인 결과를 보고함

주요내용

공 종	단위	주요 내역
		계약물량	전회기성	금회기성	잔여물량
빗물받이 흡입준설(1호)	개소	2,020	996	999	25
빗물받이 흡입준설(2호)	개소	9,700	4,828	4,855	17
빗물받이 인력준설(1호)	개소	13,280	6,873	6,382	25
빗물받이 인력준설(2호)	개소	7,500	3,862	3,600	38

기성금 지급내역

(단위 : 원)
계 약 금 액		금442,400,000원
기성금	전 회	199,000,000	44.98%	공 제	선급금	-
	금 회	185,600,000	41.95%		노무비	27,946,600
	누 계	384,600,000	86.93%
잔 액		57,800,000	13.07%		누 계	27,946,600
청구 및 지급금액		금157,653,400원

3			향후계획

위 보고 내용과 같이 금회 기성확인 요청이 타당하다고 판단되어 제2회 기성처리 하고자 함.

붙임  1. 기성검사원 지정요구 및 검사의뢰서 1부.

2. 기성확인요청서 1부.  끝.