문서번호	박물관과-10080
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	09/17 이성은
협조

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』 설계변경 자문 결과보고

2021. 9.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』

설계변경 자문 결과보고

우리부서에서 추진 중인『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』 관련, 시공자로부터 설계변경 검토보고가 접수되어 건축 분야 전문가 자문회의(서면)를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거

○ 삼청각 일화당 리모델링 변경계획[박물관과-7075(’21.7.1)호]

○ 삼청각 일화당 설계변경 및 공사 추진 계획[박물관과-9814(’21.9.10)호]

○ 삼청각 일화당 개․보수공사 설계변경 자문 실시계획[박물관과-9926(’21.9.14)호]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사

○ 시 공 자 : ㈜마노종합건설 대표 정봉휘 외2

○ 공사금액 : *******************

○ 공사기간 : **************************

□ 추진경위

○	’21. 3. 30.	:	삼청각 일화당 등 시설 개·보수 공사 착공
○	’21. 7. 1.	:	일화당 공연장 시설 개선계획(박물관과-7075, 2021.7.1.)
○	’21. 9. 3.	:	일화당 공연장 실시설계 도서 접수
○	’21. 9. 10.	:	삼청각 일화당 개보수공사 설계변경 지시(→ 시공자)
○	’21. 9. 13.	:	삼청각 일화당 개보수공사 설계변경 검토서 접수
○	’21. 9. 14.~16.	:	설계변경 자문회의(서면) 실시

□ 설계변경 자문회의 결과

○ 자문개요

- 자문기간 : 2021. 9. 14.(화) ~ 9. 16.(목)

- 자문안건 : 삼청각 일화당 공연장 공사에 따른 설계변경의 적정성 검토

- 방    법 : 서면자문(검토자료 개별 송부 후 자문의견서 작성 의뢰)

※ 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 상향으로 비대면 서면자문 진행

- 자문위원

연번	분야	소 속	성 명	비 고
*	****	************	***	********* *******************************
*	****	*********	***	*************************** ***************
*	****	*********	***

○ 자문회의 검토내용   ※ 세부내용 붙임 참조

- 설계변경 사유: 적정

□ 공사계약 일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제1항 제1목 적용

- 신규단가 적용: 적정(설계변경 당시의 단가에 낙찰율 ****** 적용)

□ 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항 제1목 적용

- 설계변경 현황 및 단가 자료의 적정성 검토

****************************************************

******************************************************************************

*********************************************************

*******************************************

************************************************************

************************************************

************************************************

******************************************************

**************************************************************

□ 처리의견

○ 설계변경 자문 내용을 시공자와 감리자에 통보하여 조치하고, 자문 내용 반영하여 설계변경 승인 및 변경계약을 추진하고자 함

□ 행정사항

○ 설계변경 자문 내용을 시공자와 감리자에 통보하여 조치하고, 자문 내용 반영하여 설계변경 승인 및 변경계약을 추진

○ 자문위원 수당 지급: 450천원

***************************************

**********************************************************************

붙 임  설계변경 자문의견서 각 1부.  끝.