문서번호	기전과-10679
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정영권		이지영	09/17 김은덕
협조

『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(2차) 공기연장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9. 16.(목)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(2차) 공기연장 검토보고

우리사업소에서 진행중인 「교통안전표지 유지보수공사」관련 시공사로부터 제출된 제2차 작업지시 완료일자 연기요청을 검토하고 보고 드림

Ⅰ		관련근거

□ 제2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 2차 작업지시

○ 기전과-7940호(2021.7.20)

□ 2차 작업지시 기간연장 요청 제출

○ 유민-2109-16호(2021.9.16.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2021. 4. 5. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜유민금속 대표 김대웅

□ 계약금액 : 금81,509,760원(금팔천일백오십만구천칠백육십원정)

□ 감리업체 : 주식회사 트래픽스 대표 김희수

Ⅲ		검토내용

□ 검토사항 : 제2차 작업지시 완료일자 연장

○ 작업기간 : 2021.9.15.(수) → 2021.10.30.(토)

○ 작업완료보고서 제출기한 : 2021. 11. 2.(화)

□ 변경사유 : 선행공정 공사 지연으로 인한 공기연장

□ 미작업내역

연번	위치	작업내용	연장사유	비고
1	역삼중 횡단보도 앞	좌회전유턴(적신호시)	노면표시 미작업
2	풍성로 67	비보호 신설	신호, 노면표시 미작업
3	방이사거리	정주식 철거(2개소)	토목공사 미작업
4	남4문교차로	정주식 철거(4개소)	토목공사 미작업
5	잠실사거리	유턴,보조표지 신설	신호, 노면표시 미작업

Ⅳ		행정사항

□ 해당 내용을『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』시공업체 및 감리업체에 발송하여 변경된 기한 내 완료토록 지시

붙임  제2차 작업지시 공기연장 요청 제출의 건 1부.  끝.