문서번호	설비부-13487
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김현기	09/17 김호성

『서울시네마테크 건립 기계 및 소방공사』

준공기한 연기 및 고용개선지원비 반영 검토보고

2021. 09.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울시네마테크 건립 기계 및 소방공사」

준공기한 연기 및 고용개선지원비 반영 검토보고

우리부에서 추진중인 「서울시네마테크 건립 기계 및 소방공사」관련, 준공기한을 연기 및 고용개선지원비 반영 요청이 있어 다음과 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 기계 및 소방공사

□ 위    치 : 서울특별시 중구 마른내로 38

□ 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,806,11㎡

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소근정 외 2개사

구분		계약금액	공사기간	도급사
기계	총차	**************	*********************	**** **********
	1차	***********	*********************
소방	총차	**************	*********************	**** **** *****
	1차	***********	********************

Ⅱ		관련근거

□ 기계공사 준공기한 연장 및 고용개선지원금 반영 승인요청

: 근정시네 제2021-269호(2021.09.15.)

□ 소방공사 준공기한 연장 및 고용개선지원금 반영 승인요청

: 근정시네 제2021-270호(2021.09.15.)

Ⅲ		검토내용

□ 준공기한 연기사유

- 공사현장 인접건물 안전확보 등으로 건축공사 준공기한이 ’22.12.10. 연기되었기에 기계 및 소방 총차 준공기한을 건축공사와 동일하게 연장하고자며,

- 변경된 건설공사 공정계획에 의거하여 기계 및 소방 1차 물량을 시공 가능한 시점으로 1차 준공 기한을 연기하고자 함

□ 고용개선지원비 반영 검토

- 반영항목 : 1)주휴수당, 2)전자인력체크시스템, 3)국민연금 및 건강보험료 지원, 4) 고용개선장려금 지원

※ 국민연금 및 건강보험료 지원, 고용개선장려금 지원은 건설공사만 해당

- 반영금액(부가가치세 미포함 금액)

구분		총차(원)	1차(원)
기계	주휴수당 (직접노무비×주휴수당 원가반영 비율×제경비)	44,573,721	1,168,084
	전자인력체크시스템 (공사기간×단말기 월렌탈비용)	2,450,000	1,225,000
	국민 건강보험료 지원 (직접노무비×국민연금,건강보험 비율×50%×0.5)	10,882,684	570,376
	고용개선 장려금 지원 (직접노무비×주휴수당 원가반영비율×20%*0.5)	3,183,837	166,869
	합계	61,090,242	3,130,329
소방	주휴수당 (직접노무비×주휴수당 원가반영 비율×제경비)	33,609,138	1,070,399
	전자인력체크시스템 (공사기간×단말기 월렌탈비용)	2,450,000	1,050,000
	합계	360,59,138	2,120,339

□ 변경내용

- 준공기한 변경내용

구분		당초	변경	증감
기계	총차	**********	**********	******
	1차	**********	**********	*******
소방	총차	**********	**********	******
	1차	**********	**********	*******

- 계약금액 변경내용

구분		당초	변경	증감
기계	총차	**************	**************	*************
	1차	***********	***********	************
소방	총차	**************	**************	*************
	1차	***********	***********	************

□ 건설사업관리기술자 의견

- 건설공사 준공기한이 연기됨에 따라, 선행 공정인 건설공사 계약변경 내용과 동일하게 소방공사 총차 및 1차 공사 준공기한을 변경하고,

- 관련 법령에 의거하여, 주5일이상 근무한 건설일용근로자 유급 휴일에 대한 주휴수당 신설 및 전자인력체크시스템 적용 등 고용개선지원비 반영은 적정한 것으로 판단됨

Ⅳ		조치계획

□ 건설사업관리단의 의견과 같이 기계 및 소방공사의 준공기한 연기와 고용개선지원비를 반영하는 것이 타당하다고 판단되므로 승인하고자 함.

붙임 :  건설사업관리단 검토의견서 각1부.  끝.