문서번호	체육정책과-9492
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		체육시설팀장	체육정책과장
김권웅		정경옥	전결 09/17 이창현
협조

- 서울 어울림체육센터 중앙투자심사 보완자료 작성을 위한 -

전문기관 컨설팅 용역 시행 계획

2021. 9

체육정책과

- 서울 어울림체육센터 중앙투자심사 보완자료 작성을 위한 -

전문기관 컨설팅 용역 시행 계획

「서울 어울림체육센터 건립」지방재정 중앙투자심사 결과 조건부 추진 통보에 따라 2단계심사 자료의 충실한 작성을 위해 전문기관 컨설팅 용역을 시행하고자 함

□ 추진배경

○ ’21년 제3차 지방재정 중앙투자심사 결과 조건부 추진 통보(’21.8월)

	< 중앙투자심사 결과 : 조건부 추진(보완 후 2단계 심사 이행) >
► 사업 목적에 부합하도록 장애인을 위한 시설계획 추가 및 규모 조정 ► 시설이용과 접근성을 높이기 위해 장애물 없는 생활환경 인증 필요 ► 연간 운영수지 적자가 예상되므로, 유지관리비용 최소화, 수익창출 방안 등 운영수지 개선 방안 마련 ► 센터의 효율적인 운영을 위한 구체적인 시설 및 인력 운용방안 마련

○ 보완사항에 대한 충실한 자료작성을 위해 전문기관 컨설팅을 시행하여 유사시설에 대한 자료조사 및 분석, 전문가 의견수렴 등 시설 및 운영전반에 대한 세밀한 검토와 재정분석으로 체계적 보완을 진행

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울 어울림체육센터 중앙투자심사 보완자료 작성을 위한 전문기관 컨설팅 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 90일

○ 계약업체 : ********************

- ******************************************************************************************************

○ 계약방법 : 수의계약

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호나목(소액)

○ 주요내용

- 장애인 시설계획 추가 및 접근성 향상 방안 마련

- 시설, 대상, 프로그램 등 구체적인 시설 운영계획 마련

- 조직구성 및 인력운영에 대한 구체적인 운영계획 수립

- 시설 유지관리비용 최소화, 수익창출방안 등 운영수지 개선방안 마련

- 중앙투자 2단계심사 의뢰서 작성 등 심사이행을 위한 제반사항 지원

□ 소요예산

○ 예 산 액 : 금 7,700,000원(부가가치세 포함)

○ 예산과목 : 관광체육국, 체육정책과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 서울 어울림체육센터 건립, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ ’21. 9월                     : 용역발주(계약 및 착수)

○ ’21. 9월~12월               : 용역시행

○ ’21. 11월~’22. 2월         : 중앙투자 2단계심사 진행

붙임 : 1. ’21년 제3차 지방재정 중앙투자사업 심사결과 공문 1부.

2. 산출조사서, 견적서 각 1부.

3. 과업내용서 1부.  끝.