문서번호	방재시설부-12208
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		김태중	09/17 박홍봉
협 조
	주무관			김소연

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(3차 1회) 및 준공기한 연기 검토보고

2021.9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(3차 1회) 및 준공기한 연기 검토보고

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」의 설계변경(3차 1회) 및 준공기한 연기에 대하여 검토 보고드림.

※ 관련공문 : 신상도감 2021-401호(2021.9.16.)

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

❍ 규    모 : 건설폐기물 운반 및 처리

❍ 용역기간 : 2019.4.1.~2021.12.31.(3차 2021.4.1.~2021.9.30.)

❍ 용 역 비 : 463,730,000원(3차 30,000,000원)

❍ 용 역 사 : ㈜삼양이앤디 외 1개사

Ⅱ		보고 내용

▢ 용역 계약현황

구 분	총 차	계약현황			장래분
		1차 (준공)	2차 (준공)	3차 (현재 계약분)
용 역 비	463,730,000원	151,390,000원	220,000,000원	30,000,000원	62,340,000원
용역기간	2019.4.1. ~ 2021.12.31.	2019.4.1. ~ 2020.10.31.	2020.11.1. ~ 2021.3.31.	2021.4.1. ~ 2021.9.30.	2021.10.1. ~ 2021.12.31.
용역규모	운반 6,750m3 처리 14,288톤	운반 2,412m3 처리 4,239톤	운반 3,100m3 처리 7,132톤	운반 400m3 처리 948톤	운반 838m3 처리 1,969톤

▢ 설계변경(3차 1회) 검토

❍ 변경사유 : 총차 공사 준공(’21.12.31.)시까지 잔여 폐기물수량 반영

❍ 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
용 역 비		30,000,000원	92,340,000원	증 62,340,000원
용역 규모	폐콘크리트	314톤	314톤	-
	폐아스콘	604톤	2,573톤	증 1,969톤
	건설폐재류	30톤	30톤	-
	혼합폐기물	0톤	0톤	-

▢ 준공기한 연기 검토

❍ 연기사유 : 원활한 공사 추진을 위하여 잔여물량에 대하여 별도 발주하지 않고 총차 공사 준공기한(’21.12.31.)에 맞추어 3차 준공기한 연기

❍ 연기내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총차	2019.4.1. ~ 2021.12.31.	2019.4.1. ~ 2021.12.31.	-
3차	2021.4.1. ~ 2021.9.30.	2021.4.1. ~ 2021.12.31.	증 3개월

Ⅲ		책임건설사업관리기술자 의견

❍ 총차 공사 준공기한에 맞추어 용역 준공기한을 연기하고 잔여 폐기물 수량을 반영하여 건설폐기물을 원활하게 처리함이 타당하다고 사료됨

Ⅵ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되는 바, 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.