투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(금속제창) 계약변경(납품기한 연장) 및 구매의뢰 요청[시립마포 실버케어센터 건립공사]

우리부에서 공사 중인『시립마포 실버케어센터 건립공사』와 관련하여 관급자재(금속제창)에 대한 ***************************** 아래와 같이 구매하고자 하오니 확인 후 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계 약 명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 관급자재(금속제창) 계약변경 및 구매

2. 구매방법 : 조달구매(G2B)

***********************

4. 변경내역(금속제창)

가. 계약기간 변경 및 금액(※ 유니크 시스템)

구 분	당 초	변 경	비 고
****	2021.01.06. ~ 2021.09.15.	2021.01.06. ~ 2021.11.14.	61일 연장
****	245,700,250원	252,378,520원	6,678,270원 증액

나. 추가공사분 내역

품 명	식별번호	모델명	단위	중 량	단 가(원)	금 액(원)	비 고
***********	********	***********	**	******	******	*********	*****
*********	********	********	**	*****	*****	*******	*****
********						*********	*****

********************************************************************

*********************************************************************************

********************************

************************

붙임  1. 관급자재 구매검토 보고서 1부.

2. 관급자재 매입요구서 1부.

3. 관급자재 수급관리조서 1부.

4. 분할납품요구 및 통지서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김완선		의료시설과장	차무흥		건축부장	09/17 신명승
협조자	주무관	손남기
시행	건축부-15125	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2609	/전송	02-3708-2659	/	seoulws88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)