“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(성산동 605번지 외 3개소 배급수관 정비공사)

성산동 605번지 외 3개소 배급수관 정비공사에 대해 설계변경 시행 및 계약 의뢰하고자 합니다.

가. 공 사 명: 성산동 605번지 외 3개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요: D=80㎜~300㎜, L=1,372m

다. 계약대상자: 욱삼건설(주) 대표 백종은

라. 공사기간: 2021. 5. 10.~2021. 12. 5.

마. 설계변경 금액 내역

구 분		당 초(원)	변 경(원)	증·감(원)
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************

바. 설계변경 사유: 시공물량 증·감 및 제경비등 정산에 의한 변경

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증․감(원)	주요공종
합계	***********	***********	************
토 공	**********	***********	***********	아스팔트포장절단 등
부설공	***********	**********	***********	주철직관(200㎜) 부설공 등
구조물공	**********	**********	***********	원형밸브실 설치공(기초재활용플라스틱) 등
부대공	**********	**********	***********	콘테이너형 가설사무실 등
사급자재비	**********	**********	**********	철개고정장치 등
제경비	***********	***********	***********	간접노무비 등

사. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(장기사용 배급수관 정비공사)

붙임  1. 설계변경 시행 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 심의위원 의견결과서 1부.

4. 심의결과 보고서 1부.

5. 합의서 1부.

6. 제비율검증 확인서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	고명환		주무관	구자람		급수관리팀장	노운학		급수운영과장	김원수
서부수도사업소장	09/17 김정일
협조자
시행	급수운영과-16082	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	imhgo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)