투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(백년다리[한강대교 남단 보행교] 조성공사)

우리부에서 시행중인 『백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장요청 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성공사(장기 1차)

나. 계약기간 : *************************************************************

다. 도 급 비 : ************

라. 시 공 사 : ************

마. 준공기한 내용

1) 준공기한 연기

****	*******	*******	**
**	****************************	**************************	****
**	****************************	**************************	******

2) 연기사유 : 국가상징거리 조성계획 수립시까지 공사일시정지

3) 귀책사유 : 발주처(도시기반시설본부)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 시공사 합의각서 1부.  끝. .

	토목부장
주무관	노승환		도시고속도로과장	김동현		토목부장	09/23 임춘근
협조자	주무관	남만조
시행	토목부-17971	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 토목부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	roh9595@seoul.go.kr	/	부분공개(5)