투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	제2차 작업지시 공기연장 승인 통보[2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』와 관련 아래와  같이 제2차 작업지시 기간을 연장하오니 2021. 11. 2.(화) 까지 공사내역서 및 작업사진(전,중,후)등을 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체

1) 감리사 : ************

2) 시공사 : ************

다. 작업기간 변경내용 ※작업완료보고서 제출기한 : 2021. 11. 2.(화)

1) 작업기간(변경전) : 2021. 7. 20.(화) ~ 2021. 9. 20.(월)

2) 작업기간(변경후) : 2021. 7. 20.(화) ~ 2021. 10.30.(토).  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	(주)유민금속,주식회사 트래픽스
주무관	정영권		기전과장	09/23 김은덕
협조자
시행	기전과-10804	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)