의원 요구 자료 제출

시 행	총무과-24864	(		)
접 수		(		)
결재일자	2021. 9. 23.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	기획담당관

주무관	시설관리팀장	총무과장	행정국장		결재
한철민	김창중	김혁	09/23 김상한
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 3660번, 백혜련 의원, 행정안전위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

백혜련 의원(행정안전위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 3660

1. 서울시 신청사(본청) 조성사업 관련

ㅇ 서울시 신청사(본청) 건설/조성 사업 최초 추진 기본계획(방침)

- 사업개요, 사업예산액수(총 투입예산액)

- 조성사업 추진 계획수립 이후 ~ 완료 시까지 경과, 일시별 경과 및 사업변경 현황 포함

- 설계업체, 시행업체, 시공업체 등 사업추진업체 입찰 참여업체명, 최종 선정 업체명 현황 (사업추진 관련 관련 용역입찰 모두 포함)

□ 서울시 신청사(본청) 건설/조성 사업 최초 추진기본계획(방침)

: 별도 첨부

□ 사업개요, 사업예산 액수( 총 투입 예산액)

○ 사업개요

- 사 업 명 : 서울특별시 청사 증축공사

- 대지위치 : 서울시 중구 세종대로 110

- 건립규모 : 지하5층 지상13층, 총면적 83,551㎡

- 주 용 도 : 공공업무시설(행정사무공간, 시민청, 하늘광장, 다목적홀 등)

○ 신청사 건립 총 사업비 내역                                   (단위 : 백만원)

구 분		소요 비용	비 고
총 계		298,918	설계비 포함
신 청 사	소 계	234,818
	시 설 비	223,929
	감 리 비	6,261
	시설부대비등	4,628
서 울 도 서 관(시설비)		64,100

□ 신청사(본청) 조성사업관련 추진일정

○ 2005.  4.  6 : 사무환경 개선을 위한 신청사 증개축 추진계획(시장방침)

○ 2006. 5. 30~11.30 : 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 2005.  7.25 : 공유재산 심의

○ 2005.12.  1 : 시청사 증축공사 발주의뢰(조달청)

○ 2006.  4.12 : 실시설계 적격자 및 우선공사 대상자 선정(조달청→서울시)

- 턴키 실시설계 적격자 선정(삼성물산(주) 컨소시엄)

○ 2006.  5.12 : 공사 계약

○ 2006. 6.16~2007. 9. 7 : 턴키(안) 문화재심의 부결(1~5차 심의- 문화재청)

○ 2007.10.  5 : 문화재위원회 6차 심의 원안가결(문화재정)

○ 2007.11.28 : 신청사 컨셉등 디자인(안) 공모시행

- 국내건축가 4명(류걸, 박승홍, 류춘수, 조민석) 설계작업

○ 2008.  2.15 : 신청사 대 디자인(안) 공모 당선작 확정(당선작-유걸)

○ 2008.  3.31 : 공사착공

○ 2008.  5.20 : 신청사 건립공사 기공식

○ 2010.  1.22 : 매장분관 문화재위원회 심의

- 중요 유구 이전 후 현 위치에서 원상태 대로 복원

○ 2010.  4.  1 : 공유재산 변경심의(시의회 – 원안가결)

- 대표도서관 및 시티갤러리 추진관련

○ 2010.  4.29 : 중앙투자심사(행정안전부)

- 사업은 현행대로 추진하되 도서관은 적정규모 검토 후 추진

○ 2012.  8.29 : 공사완료 통보(중구청)

○ 2012.  9.  1 : 신청사 입주 시작(9.23 완료)

○ 2012.10.13 : 신청사 개청식

□ 설계업체, 시행업체, 시공업체 등 사업추진업체 입찰참가 업체명, 최종 선정 업체명 현황

○ 설계·시공 일괄입찰(Turn Key)

- 참여업체(적격심사)

순위	1위업체	2위업체	3위업체	4위업체
업체명	삼성물산(주)	현대건설(주)	대림산업(주)	롯데건설(주)

- 최종 선정 업체 : 삼성물산(주) 대표 이상대 – 삼성물산컨소시엄

○ 전면 책임감리용역

- 참여업체(적격심사)

순위	1위업체	2위업체	3위업체	4위업체	5위업체
업체명	㈜건원 엔지니어링	㈜유탑 엔지니어링	㈜한성 종합기술단	㈜신화 엔지니어링	㈜선 엔지니어링

- 최종 선정 업체 : ㈜건축사사무소 건원 엔지니어링 대표 전형철.

붙임 : 방침서(사무환경 개선 등을 위한 시청사 증·개축 추진계획) 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (총 무 과)	시설사무관	김 창 중
	☎2133-5662	주무관	한철민
	작 성 일 : 2021. 9. 23