투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰_거점형 키움센터(3호) 조성 전기, 통신공사

우리 본부에서 추진중인 「거점형 키움센터 조성공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 변경내용

구 분		전 기	통 신	비 고
공 사 명		거점형 키움센터(3호) 조성 전기공사	거점형 키움센터(3호) 조성 통신공사
계 약 자		동서에너지 대표 박시용	㈜동방데이타테크놀러지 대표 원덕순
계약금액	당 초	331,718,360원	123,028,060원
	변 경	305,729,000원	106,183,000원
	증․감	감)25,989,360원	감)16,845,060원
공 사 기 간		2021.04.26.~2021.09.30.(변경없음)

4. 변경사유 : 물량 변경 및 보험료 정산

5. 예산과목 : 아이돌봄담당관, 행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성,
지역격차 해소를 위한 균형발전 추진, 거점형 키움센터 설치,
시설비(예산편성부서: 여성가족정책실 아이돌봄담당관)

붙임 1. 설계변경 검토보고 각1부.

2. 설계변경 제출 공문 각1부.

3. 합의각서 각1부.

4. 제비율 검증 확인서 각1부. 끝.

	설비부장
주무관	유영선		녹색성장과장	문학준		설비부장	09/23 김호성
협조자
시행	설비부-13544	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층 무교동	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8636	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	부분공개(5)