문서번호	건축부-15265
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이랑		조영수	09/24 신명승
협 조

「마곡산업단지 공공지원센터 건립공사」

교통영향평가 변경신고 용역 시행계획

2021. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「마곡산업단지 공공지원센터 건립공사」

교통영향평가 변경신고 용역 시행계획

「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사」와 관련, 공사 중 설계변경 등으로 인하여 교통영향평가 변경신고 용역을 다음과 같이 시행코자 함.

1		추진근거 및 사유

□ 추진근거

○ 도시교통정비촉진법 제21조(교통영향평가서의 변경)

○ 교통영향분석․개선대책수립지침 제29조(교통개선대책의 변경

허용 인정범위 등 신고대상)

□ 추진사유

○ 설계변경 등으로 인하여 기 시행한 교통영향평가 내용의 진출입 동선 및 주차램프, 동선등이 변경되어 관계법령에 따라 교통영향평가 변경 신고 필요

2		추진경위

○ 2017. 12. : 교통영향평가 심의(강서구)

○ 2018.  8. : 공사착공

○ 2020.6. ~ 2021. 3. : 사업의뢰부서 설계변경 요청

○ 2021. 9월 현재: 마감공사 진행 중

3		용역 시행계획

○ 용 역 명: 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 교통영향평가 변경신고 용역

○ 용역기간: 착수일로부터 2개월

○ 소요예산:

○ 주요 과업내용

- 최초심의 결과 요약 및 변경신고에 따른 교통개선대책 내용 작성

- 교통영향평가 변경신고에 필요한 협의 수행

- 성과품 작성

○ 시행방법: 1인견적 수의계약

- 수의계약 사유: 추정가격 15백만원 이하의 소액이며, 공사준공일이 도래됨에 따라 조속한 용역 수행 필요

○ 수의계약 대상자: ㈜ 진흥이앤씨 (서초구 서초대로48길 180, 501호)

○ 예산과목: 창업생태계 활성화를 통한 경제활력 제고, 체계적 창업시스템 구축, 마곡산업단지 공공지원센터 건립, 시설비

4		향후계획

○ 2021.  9.: 용역계약 및 착수  ※ 기술용역타당성심사 미대상(자체심사)

○ 2021. 10.: 용역수행

○ 2021. 11.: 용역준공

붙임 1. 과업내용서 1부.

2. 산출기초초사서 및 견적서 각 1부.  끝.