“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	장기사용 배급수관 정비공사 설계변경 시행(천호동 48번지 일대)

1. 우리사업소에서 시행하여 ******에 공사감독 위탁중인「******** 일대 외 5개소 장기사용 배급수관정비공사」에 대하여 상수도사업본부의 계약금조정 검토를 완료하고 아래와 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

가. 공사명: ******** 일대 외 5개소 장기사용 배급수관정비공사

나. 계약자: ***********

다. 계약기간: 2021. 5. 3. ~ 2021. 9. 29.

라. 공사개요: 당초 D=20~200mm, L=860m

변경 D=20~200mm, L=843m(감 17m)

마. 설계변경으로 인한 계약금액 조정내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	800,530,410	800,530,410	-
도 급 비	298,420,410	290,006,000	(감)8,414,410
관 급 비	120,000,000	120,000,000	-
복구비 및 기타	382,110,000	390,524,410	(증)8,414,410

바. 설계변경 사유: 공종별 계약물량 증·감 및 신규공종 발생

사. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비, 시설비(장기사용 배급수관 정비)

붙임  1. 설계변경(정산) 검토보고서 제출 1부.

2. 설계변경 검토 의견서 1부.
3. 설계변경 내역서 1부.
4. 제비율검증 검토필(기술심사담당관) 1부.

5. 합의서 1부.

6. 수량산출서 1부. 끝.

주무관	강희창		시설안전팀장	김주경		주무관	이진이		시설관리과장	代송종학
강동수도사업소장	09/27 김명용
협조자	주무관	한호진		주무관	최성태
시행	시설관리과-16125	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)541-4	/
전화	02-3146-5197	/전송	02-3146-5239	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)