문서번호	박물관과-10306
결재일자	2021. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		代김소연	09/28 이성은
협조

『삼청각 일화당 등 시설 개․보수공사』

예비준공검사 시행계획

2021. 9.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 일화당 등 시설 개․보수공사』

예비준공검사 시행계획

우리부서에서 추진하고 있는 「삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사」에 대해 예비준공검사를 실시하여 공사품질 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 건설기술진흥법 시행령 제56조

❍ 건설공사 예비준공검사 시행방법 개선〔기술심사담당관-10083(‘18. 06. 28.)호〕

- 예비준공검사 시기 및 주체: 준공 2개월 전 발주청 소속직원 2인 이상

(유지관리부서 직원 입회)

□ 공사개요

❍ 위    치 : 서울특별시 성북구 대사관로 3외 3필지

❍ 규    모 : 지하2층/지상2층, 7개동, 총연면적 4,339㎡

❍ 공 사 명 : 삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사

❍ ***************************************

❍ ********************

❍ ****************************

❍ ******************

□ 예비준공검사 실시계획

❍ 일    시 : 2021. 9. 30.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 삼청각 현장

❍ 참 석 자  13명

- 검사자(4) : 박물관과 한식문화공간조성추진반장, 주무관(***********)

- 유지관리기관(2) : 세종문화회관 삼청각 운영T/F팀장 외1

- 설계자(1) : ㈜다올건축사사무소 *** 부장

- 감리자(2) : ㈜에이아이앤건축사사무소 대표 *** 외1

- 시공자(4) : ㈜마노종합건설 현장대리인 *** 외3

※ 코로나19 방역수칙 준수하여 검사자 각자 현장 점검 위주로 검사 시행

❍ 주요검사내용

- 현장 시공 상태와 설계도면 일치 여부

- 품질관리 상태, 공사장 안전관리 및 정리정돈 상태

- 유지관리기관(세종문화회관) 요청사항 확인 및 반영

- 감리자가 확인한 정산설계도서 및 감리보고서 등 확인

- 하자 발생 여부 확인

- 기타 예비준공검사 시행 목적에 부합한 사전 점검 사항 등

□ 향후계획

❍ ’21. 10. 5. : 유지관리부서 의견 수합 후 검사 결과 통보

❍ ’21. 10. 15.: 예비준공검사 지적사항 보완

❍ ’21. 11. 30.: 공사 준공