문서번호	건축부-15563
결재일자	2021. 9. 29.
공개여부	부분공개(5,6,7)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
고병준		차무흥	09/29 신명승
협조
	주무관		손남기

광역소공인 특화지원센터 건립공사(1차) 준공검사 결과 보고

2021. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

광역소공인 특화지원센터 건립공사(1차) 준공검사 결과 보고

「광역소공인 특화지원센터 건립공사」 1차 공사가 완료되어 건설사업관리자로부터 준공검사 결과보고가 접수됨에 따라 검토 결과를 보고 드림

1		공사개요

○ 공 사 명: 광역소공인 특화지원센터 건립공사

○ 위    치: 성동구 아차산로17길 9(성수동2가)

○ 규    모: 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎡

차수	계약금액(원)	계약기간	비고
**	*************	***********************
**	**************	***********************	*****
**	*************	***********************	***

○ 용    도: 공장, 업무시설, 제1종근린생활시설

○ 시 공 사: 세이브건설(주), 이레비앤디(주), ㈜블루트리이엔지

○ 감 리 사: (주)포스코에이앤씨건축사사무소, (주)비전이엔지기술사사무소

2		추진경위

○ ‘20. 06.30.: 공사 착수

○ `21.06.28.: 1차수 공사기간 연장(‘21.06.30.⇒’21.08.06.)

○ `21.08.06.: 1차수 공사기간 연장(‘21.08.06.⇒’21.09.06.)

○ `21.09.06.: 총차 공사금액 증가(46.3억⇒55.6억), 1차수 공사 준공계 제출

○ `21.09.07.: 2차수 공사계약

○ `21.09.15.: 1차수 공사 준공검사

3		준공검사 내용

□ 관련근거

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조,제103조(기성,준공검사 및 재시공)

○ 광역소공인 특화지원센터 건립공사 제1차수 준공검사 결과보고(건축 CM그룹-21-01378호, ‘21.9.23.)

4		건설사업관리기술자 검토의견

○ 광역소공인 특화지원센터 건립공사 중 1차분 공사 준공에 따른 정산 산출내역 및 설계 도서를 검토한 결과 적정하다고 판단됨.

5		처리의견

○ 건설사업관리자 검토의견과 같이 1차공사 완료에 따른 준공금 지급(준공) 처리하고자 함.

붙 임: 광역소공인 특화지원센터 건립공사 제1차수 준공검사 결과보고 1부.  끝.