문서번호	교량안전과-14835
결재일자	2021. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장
안창용	박찬규	09/29 조현석

- 광진교 난간 보강사업(난간 제작·설치) -

사업기간 연기 검토보고

2021. 09.

안전총괄실

(교량안전과)

- 광진교 난간 보강사업(난간 제작·설치) -

사업기간 연기 검토 보고

「광진교 난간 보강사업(난간 제작·설치)』시행중 추가 작업발생 등에 따른  사업기간 연기검토에 대한 보고임. ※ 관련근거 : 한강교량감 2021-533(2021.9.23.)

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 광진교 난간 보강사업(난간 제작설치)

□ 규    모 : 광진교 난간 인상(H=1.1m ⇒ 1.7m, L=2,066m)

□ 사업기간 : ’21. 6. 4 ~ 10. 2

□ 총사업비 : 671,190천원(도급액 606,737천원)

□ ***************

Ⅱ		추진사항

□ ’21. 6.  4. : 사업착공

□ ’21. 7. 27. : 난간색상 선정

□ ’21. 8.  2. : 난간설치관련 세부협의

□ ’21. 8.  4. : 난간 시범설치(2경간)

□ ’21. 9. 13. : 난간 반입 및 설치

Ⅲ		사업기간 연기 검토

□ *********

○ ***********************************************************************************************************************************************

□ 사업기간 연기

***	****	****	**
****	********************	********************	******

○ 귀 책 사 유 : 서울시

○ 지연배상금 : 미부과

- 공사계약 일반조건 제9절 10항에 의거 계약상대자의 책임 없음.

Ⅳ		조치계획

□ 사업기간 연기에 따른 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 준공기한을 연기 시행코자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술자 검토의견서  1부.   끝.