문서번호	정수시설과-2629
결재일자	2021. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
강석윤		오삼록	09/29 신동호
협 조
	주무관			김금옥

‘상수도사업본부 발족 30년! , 수돗물 통수 111년! , 믿고 마시는 아리수’

[여과지 유출관 거름망 설치공사]

설계변경 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

강북아리수정수센터

정수시설과

[여과지 유출관 거름망 설치공사]

설계변경 시행보고

『강북아리수정수센터 여과지 유출관 거름망 설치공사』보험료 등 제경비 사항에 대한 감액이 있어 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 강북아리수정수센터 여과지 유출관 거름망 설치공사

□ 사업기간 : 2021. 8. 4 ~ 10. 8

□ 계약금액 : 금163,348,200원

□ 계 약 자 : ㈜ 대현이엔지  김화석

□ 계약내역

◯ 여과지 유출부 거름망 스텐레스 구조물 설치 : #3,4계열 27개

Ⅱ		설계변경 사항

□ 계약금액 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감액
총공사비	금163,348,200원	금156,178,000원	금7,170,200원(감)
공급가액	금148,498,364원	금141,980,000원	금6,518,364원(감)
부가세	금14,849,836원	금14,198,000원	금651,836원(감)

□ 주요 변경 내역

연 번	변경 사항	당 초	변 경	증․감
1	건강, 연금, 노인장기요양 보험료 등 미지급으로 인한 정산	5,346,171	0	감)5,346,171
3	경비금액 변경으로 인한 일반관리비 및 이윤 변경	17,183,200	16,011,007	감)1,172,193

Ⅲ		조치계획

□ 보험료 및 제경비 변경에 따른 설계변경 정산 시행

◯ 설계물량 증·감 및 추가 공정 발생에 따른 설계변경이 아니므로 자체 설계변경 심의위원회는 생략

붙 임 : 1. 설계변경내역서(안) 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 산업안전관리비 사용내역서 1부.

5. 고용·산재 보험료 완납증명서 등 각1부.  끝.