“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약(준공기한 연기) 의뢰

1. 광화문광장추진단-10732(2019.9.19.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진하고 있는 「새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한 연기)을 의뢰하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계

나. 계 약 자 : (주)씨에이조경기술사사무소(대표 진양교, 02-543-4454)

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 차	'19.3.22.~'20.1.22.(307일)	'19.3.22.~'20.6.22.(458일)	증 151일
1 차	'19.3.22.~'19.9.21.(184일)	'19.3.22.~'19.11.25.(249일)	증 65일
2 차	'19.9.22.~'20.1.22.(123일)	'19.11.26.~'20.6.22.(209일)	증 86일

라. 계약금액 : 변경없음

마. 변경사유

- 시민소통, 공감대 부족 등의 지적에 따른 추가 절차 이행으로 기본 및 실시설계 기간 연장 필요

바. 예산과목 : 광화문일대 역사성 장소성 회복, 시민중심대표공간 조성(특별회계), 경복궁 광화문 월대 복원 등 주변 정비사업, 시설비(401-01)

붙임  1. 준공기한 연기 방침 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.
3. 합의각서 1부.  끝.

	광화문광장추진단장
주무관	진철웅		광장계획팀장	이강수		광화문광장사업반장	09/19 임창수
협조자
시행	광화문광장추진단-10738	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울시청	/
전화	02-2133-7737	/전송	02-2133-0737	/		/	부분공개(5)