문서번호	시설과-4145
결재일자	2019.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		시설과장	중부공원녹지사업소장
기효상		김재균	09/20 박미애
협조
	공원운영과장		이인수

「남산공원 시설정비 및 조성공사」

공사계획 변경 검토 보고

2019. 9.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

남산공원 시설정비 및 조성공사

공사계획 변경 검토보고

********************************************************************************************.

□ 관련근거

○ 남산공원 *********** 관련 후속조치 이행요청 (공원녹지정책과-17433, 2019.9.18.)

- 남산공원 **************** 검토 보고(공원녹지정책과-17309, 2019.9.16.)

	<보고내용>
○ ************************************** ○ ******************************* - ************************************************* ○ ******************** - ******************************************** ************************ · ************************************************* ******************************** ※ 공사명 : 남산공원 시설정비 및 조성공사 (도급액 818백만원)

□ 추진경위

○ ’15. 3. 5. : 남산 ‘대기청정지역’ 지정계획 수립(행정제1부시장 방침)

-「남산 예장자락 재생사업, 곤돌라 사업」완료시 관광버스 진입제한(’18~)

- 남산 대기청정지역 지정 공청회 개최(‘15. 3. 30)

○ ’16. 7. 23. : 시장 요청사항(시장과의 주말데이트)

- 요청내용) 남산공원의 관광버스로 인한 매연 및 소음피해를 최소화하기 위하여

관광버스 진입통제 시기를 ’18년에서 앞당겨 시행

- 유관부서 회의(8.25), 순환도로 현장조사 및 맹꽁이전기차 시험 운행(9.6)

○ ’17. 5. ~ ’17.9. : 친환경교통수단 도입을 위한 기본계획 용역(서울연구원)

- 친환경 교통수단 종류(전기버스)와 노선(예장자락~국립극장~남산도서관) 결정

○ ’18.1. ~ ’18.12. : 남산공원 환승장 조성을 위한 기본 및 실시설계용역

○ ’18.11. 30. : 남산공원 시설정비 및 조성공사 추진계획(중부공원녹지사업소)

○ ’18.12. 20. : 공사계약(착공:12.26)

○ ’19. 9. 20. : **************************

(공원녹지정책과→푸른도시국장)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 남산공원 시설정비 및 조성공사

○ 공사개요: 패널식 옹벽384m, 경계석설치 558m, 아스팔트 포장 2,168㎡ 등

○ 공사기간: 2018.12.26. ~ 2019.09.21.(연기:2019.12.31.)

○ 도 급 비: 817,899천원

○ 도 급 자: 장위건설(주) 대표 유용수

○ 감독기관: 서울시설공단 공사감독2처 이성림외 1인

□ 검토내용

○ 남산공원 정상부는 남산공원 친환경 교통수단 도입 현안사항 검토보고 내용과  동일하게 추진.

○ 또한, 국립극장 입구에 위치한 매표소는 굽어진 도로상에 위치하고 있어 차량  등 안전사고 위험이 있어 공사에 반영하여 구조개선 시행.

○ 공사계획 주요변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
환승장 (국립극장 인근)	********* ************* ******** **********	*************** ***************
남산정상	******* ******	******* ************** **************	노후도가 심함부분 우선정비

○ 기 계약된 도급액 범위 내에서 변경 시행

□ 조치계획

○ 남산공원 시설정비 및 조성공사는 위 공사계획 변경 내용으로 설계변경 시행

※ 매표소 진입부 등 상세설계 후 별도보고

○ ********************************** 공사중지를 해제하고 공사계획 변경 내용을 시공사, 감독기관에 통보하여 공사시행

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9. 23 : 공사중지  해제 및 공사계획 변경 시공사, 감독기관 알림

○ 2019. 9월 말 :  설계도서 작성, 관급자재(목재 등) 구매,  남측순환 도로 포장에 따른 관계기관 협의

붙임  1. 관련공문 1부

2. 공사계획 변경 위치도 1부. 끝.