코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	가설건축물 존치기간 연장 및 축조협의(도시계획시설사업 관련)

1. 중구청 건축과-20603(2021.9.23.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서는 남산 회현자락에서 발굴한 한양도성 성곽유구(사적 제10호)의 보존처리와 보호시설, 탐방로 등을 설치하여 ‘한양도성 유적전시관’으로 조성·운영하고자 도시계획시설(공원)사업 실시계획을 고시(제2018-277호, 2018.9.13.)하고 2018.12월부터 관련공사를 진행하여 야외 한양도성 유적전시관은 2020.7월 공사를 완료하였으나

3. 전시관리실(전시,안내,화장실)은 부지내 남산공원 매점 이전과 관련한 각종 소송과 재설계 등으로 착공이 지연되었으며 금년내 착공을 예정하고 있으므로 가설건축물 존치기간 연장이 필요하여 「건축법」제29조(공용건축물에 대한 특례)에 따라 협의(신청)하오니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 위    치: 중구 회현동1가 100-267번지

나. 건 축 주: 서울특별시장

다. 협의사항

1) 가설건축물 존치기간 연장(2020- 건설건축물축조신고-2)

- 개요: 연면적 108㎡, 지상1층, 공사용 임시사무실 및 창고

- 연장: 당초 2021.12.30. 변경 2023.6.30.

- 사유: 공사기한 연장에 따른 가설건축물 존치기간 연장필요

2) 가설건축물 존치기간 연장(2020- 건설건축물축조신고-3)

- 개요: 연면적 48㎡, 지상1층, 2개동, 임시사무실, 컨테이너구조

- 연장: 당초 2021.12.30. 변경 2023.6.30.

- 사유: 공사기한 연장에 따른 가설건축물 존치기간 연장필요

붙임 1. 가설건축물 치기간연장 신고서(서식) 1부

2. (참고)도시계획시설(변경)결정 고시문, 교양시설(박물관 안내실=전시관리실) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	09/29 백운석
협조자
시행	한양도성도감-8627	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	대시민공개