코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 변경의뢰(홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계용역)

하천관리과-12993호(2021.09.28.)와 관련입니다.

2. 「홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역

2) 계약기간 : 2020. 05. 20. ~ 2021. 09. 30.

3) 계약금액 : 금이억일천사백오십사만삼천원(￦ 214,543,000원)

나. 준공기한 연기 내용

구 분	과업기간	계약금액	비고
당 초	’20.5.20. ~ ’21.09.30.	214,543천원	용 역 비 변동없음
변 경	’20.5.20. ~ ’21.11.20.

붙임 : 1. 방침서(준공기한 연기 보고)  및  준공기한 연기 의뢰서 각 1부.

2. 용역사 합의각서 1부.  끝.

	하천관리과장
주무관	박계현		하천계획팀장	권혁제		하천관리과장	09/29 손경철
협조자
시행	하천관리과-13053	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 하천관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3884	/전송	2133-1004	/		/	부분공개(5)