문서번호	물순환정책과-17188
결재일자	2021. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장
최용석	김서연	09/29 김재겸

CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역 추가과업에 따른 설계변경 검토보고

2021. 9.

물순환안전국

(물순환정책과)

『CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역』

추가과업에 따른 설계변경 검토 보고

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역」수행 중 추가과업 발생에 따른 설계변경을 검토 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역

○ 용역기간 : ’21.3. ~ ’21.12.

○ 용 역 비 : 301,390천원

○ 용 역 사 : ㈜범한엔지니어링, ㈜삼우씨엠건축사사무소,(주)삼우전기컨설턴트

□ 주요 과업내용

○ CSOs 저류조 설치 계획 수립을 위한 기초자료 수집 및 현장조사

○ 뚝섬, 대치유수지 내 CSOs 저류조 설치계획 수립

- 사업 타당성 및 경제성 분석‧결과 제시

- 대상지역의 처리유량, 오염부하량 조사

- 소요사업비 및 사업기간 산정, 연차별 투자계획 수립

○ 기설치 시설 운영현황 분석을 통해 물재생센터 연계 운영계획 수립

○ 유수지내 CSOs 저류조 설치 계획외 CSOs 저류‧처리 방안 제시 등

□ 추가과업에 따른 계약금액 변경 사항

○ 계약금액 : (당초) 301,390천원 → (변경) 339,220천원

					(단위 : 천원)
구 분	당 초	변 경		증 감
타당성조사 및 기본계획	242,966	242,966		0
직접경비(유량 및 수질조사)	28,248	62,459		37,830
자 문 비	1,350	1,350		0
손해보험료	1,428	1,607		0
부가가치세	27,398	30,838		0
총 용역비	301,390	339,220		37,830

○ 용역기간 : 변경없음

□ 추가과업 발생 사유 및 내용

○ 추가과업 발생 사유

- CSOs 저류시설의 정확한 용량산정을 위해 대표 토구 1지점이 아닌 차집관로에 연결되는 각 토구별로 유량 및 수질조사 실시에 따른 물량 변경

○ CSOs 저류조 용량산정을 위한 수질조사 지점 및 수질검사 횟수 증가

- (대표 토구) 뚝섬, 대치 각 1지점 → (토구별) 뚝섬 2지점, 대치 3지점

- 검사지점(토구별) 증가에 따른 수질검사 횟수 증가

□CSOs 유량조사(우천시) : 4회(2지점×2회) → 10회(5지점×2회)

□차집관거 유량조사(청천, 우천시) : 8회(2지점×4회) → 20회(5지점×4회)

□CSOs 수질조사(청천, 우천시) : 96회(2지검×24회×2일)→216회

(청천시 3지점×4회×2일, 우천시 6지점×16회×2일)

※ CSOs 수질조사는 청천시 4회 측정, 우천시 16회 측정(10분간격 3~6회, 나머지 횟수는 1~3시간 간격, 2일 측정) 변경

○ 세부 변경내역(직접경비, CSOs 유량 및 수질조사)

			(단위 : 천원)
구 분	계약금액	변경금액	증 감	비 고
하천수질조사	1,396	1,396	0
CSOs 수질조사	16,752	37,692	20,940	조사지점 증가
CSOs 유량조사	2,949	7,373	4,424	지점 및 횟수 증가
차집관거 유량조사	5,898	14,745	8,847	지점 및 횟수 증가

□ 검토결과

○ CSOs 저류시설의 정확한 용량산정을 위해 차집관로에 연결되는 각 토구별로 유량 및 수질조사 실시에 따른 물량 변경이 타당한 것으로 판단됨

□ 소요예산

○ 추가과업에 따른 수질조사 비용 집행을 위한 추가 예산이 필요하나 낙찰차액 범위내 집행이 가능하여 추가 예산을 요구하지 않고 낙찰차액 사용

○ 예산과목

- 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립, 시설비 및 부대비, 시설비(용역비)

□ 행정사항

○ 추가과업 발생에 따른 계약변경 요청(물순환정책과 → 재무과)

붙  임 1. CSOs 저류조 설치 기본계획용역 추가과업에 변경요청 공문 1부.

2. CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역 과업수행계획서 1부.

3. CSOs 저류조 기본계(대치,뚝섬) 낙찰내역서-설계변경 1부.

4. 서울시 CSOs 저류조 설치 기본계획 합의각서 1부.

5. 설계변경사유서 1부.   끝.

Ⅰ		자 문 현 황

□ 자문대상

연번	사업명	위치	대지면적(㎡)	빗물관리시설 설치계획
1	********************	***********	**********	***** ***** ****** **** ******	********* ******** **** ****** ********

□ 자문개요

○ 자문위원 : 저영향개발 자문 소위원회 위원 3명

**************************

○ 자문형태 : 서면자문

- 대지면적 5만㎡ 이상 1곳 대면자문 대상

Ⅱ		주요 자문의견

****************************

**********************************

*******************************

Ⅲ		향 후 계 획

□ 자문결과 통보

○ 자문의견을 반영하여 조치계획 수립 후 사전협의를 신청할 수 있도록 해당 사업부서에 자문결과 통보

□ 행정사항

○ 자문위원 자문수당 지급 : ***********************

- 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 물순환 정책 확산을 위한 거버넌스 다각화, 사무관리비

붙임 1. 주요 자문의견 1부.

2. 사업별 자문의견서 각 1부.  끝.