투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	굴착복구 작업지시(제2,3,4차) 작업기간 연장 승인 통보

1. 도로굴착(1권역)-150호(2021. 9.30.)호 및 토림2021-9290호(2021. 9.29.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소와 귀 사간 계약 체결하여 진행중인『도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리용역(1권역)-장기계속』과 관련하여 「2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)」작업지시(제2,3,4차) 작업기간 연장 승인 요청사항에 대하여 아래와 같이 통보합니다.

가. 작업기간 연장요청 내용

1) 작업기간 연장사유: 굴착자의 굴착공사 지연으로 인하여 불가피하게 작업기간 연장 필요

2) 작업기간 연장 내용 및 책임건설사업관리기술자 검토의견

구분	작 업 기 간		책임건설사업관리기술자 검토의견
	당초	변경
작업지시 (2차)	2021.04.15. ~ 2021.09.30.	2021.04.15. ~ 2021.10.30.	본 공사는 굴착자(비관리청)가 도로법에 따라 도로공사시 허가를 득한 후 굴착하여 목적물이 완료된 구간에 도로를 포장복구하는 작업으로, 일부구간에 대하여 굴착자의 굴착공사 지연으로 인하여 부득이하게 작업기간 연장이 필요 함.
작업지시 (3차)	2021.05.04. ~ 2021.09.30.	2021.05.04. ~ 2021.10.30.
작업지시 (4차)	2021.05.18. ~ 2021.09.30.	2021.05.18. ~ 2021.10.30.

나. 통보내용

- 건설사업관리책임기술자 검토의견 및 관련규정 등 제반사항에 대하여 검토한 결과, 현재 작업이 완료되지 않은 구간은 계약상대자〔토림건설(주)〕귀책사유가 없다고 판단되어 작업기간 연장 승인요청건에 대하여 승인통보하오니 변경된 작업기간내 작업을 완료하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	한국건설관리공사 책임건설사업관리기술자 박건옥 귀하,토림건설(주) 대표 박두호 귀하
주무관	김영봉		도로보수과장	09/30 이수범
협조자
시행	도로보수과-7107	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	2210-1538	/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개