코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	추가과업에 따른 계약변경 의뢰[CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역]

1. 물순환정책과-17188호(2021.09.29.)와 관련입니다

2. 우리부서에서“CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역”추진 중 추가과업 발생에 따른 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역

나. 용역기간 : 2021. 3.31. ~ 2021.12.31.까지

다. 계약금액 : 금301,390천원원

라. 계 약 자 : ㈜범한엔지니어링, ㈜삼우씨엠건축사사무소, ㈜삼우전기컨설턴트

마. 계약변경내용

- CSOs 저류시설의 정확한 용량 산정을 위한 유량 및 수질조사 물량 증가

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
***	*********	*********	**********	**************

바. 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립, 시설비

※ 추가과업에 따른 수질조사 비용 집행을 위한 낙찰차액 사용

붙임 : 1. CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역 추가과업에 따른 설계변경 검토보고 1부

2. 합의각서 1부

3. 설계변경 내역서 1부.   끝.

	물순환정책과장
주무관	최용석		물순환시설팀장	김서연		물순환정책과장	09/30 김재겸
협조자	계약1팀장	代정호욱
시행	물순환정책과-17261	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물순환정책과	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/	kr101092@seoul.go.kr	/	부분공개(5)